안전한 도시철도, 편리한 교통서비스
			서울교통공사
수신자		수신자참조
(경유)
제목	지하철 1~4호선 노후시설 재투자 사업 추진현황 점검회의(1분기) 지시사항 알림

1. 서울시 도시철도과-3838호(2019.4.10.)“세출예산 추진현황 점검회의(1분기) 지시사항 통보(지하철 1~4호선 노후시설 재투자)”와 관련입니다.

2. 서울시로부터 지하철 1~4호선 노후시설 재투자 사업 추진 현황(공정 및 집행) 점검회의 결과 지시사항이 통보되어 알려드리니 해당부서에서는 조치결과(계획)을 마련하여 ’19.4.25(목)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 서울시 지시사항

		< 지 시 사 항 >
가. ’19년 국고보조사업 추진 1) ’19년말 목표공정 20% 미만 사업(변전설비 등 9건)인 사업에 대한 공정만회 대책을 마련하고, 만회대책 및 수정 공정계획표 제출(’19년말 목표공정을 최소 20%이상 추진) 2) ’19년 세출예산 미 편성된 사업에 대해 총 사업비의 20% 이상을 세출예산(추경예산) 으로 편성하고, 사업별 예산(변경) 편성 계획 제출(’19년 310억원 이상 집행 목표) 나. ’18년 국고보조사업 추진 1) 현재 예산집행이 매우 저조한 바, 공정 및 집행 제고대책을 마련하여 제고대책 및 공정(집행)계획표 제출(모든 사업은 ’19년 12월말 완료 목표로 추진) 2) 국비 반납액이 발생하지 않도록 지하철 노후시설 개선에 최대한 사용하고, 반납액 최소화를 위한 집행잔액(낙찰차액, 계약심사 절감액 등) 사용계획서 제출

○ 조치결과 제출(작성양식)

- ’19년말 목표공정 20% 미만 사업(9건) : 만회대책 및 수정 공정계획표 제출

사업명(위치, 개소)		’19년말 공정	부서명
변전설비	제기, 압구정, 회현	9~10%	전기처
전기실	서울1, 종각, 안국, 잠원, 일원	10%	전기처
열차무선	4호선	10%	정보통신처

- ’19년 세출예산 미 편성 사업(2개) : 총 사업비의 20%이상 세출예산 편성 계획 제출

· 대상 : 전기실 설비 개량(전기처), 열차무선시스템 개량(정보통신처)

- ’18년 국고보조사업(모든사업) : 공정(집행) 제고대책 및 공정(집행) 계획표 제출

붙임 : 1. 서울시 관련 문서 1부.

2. 조치결과 작성양식 각 1부.

3. 세출예산 추진현황 점검회의(1분기) 회의자료. 끝.

	예산처장
수신자	전기처장, 정보통신처장, 궤도처장, 신호처장, 기계처장, 승강기관리단장
차장		처장	전결 04/15
협조자	예산처 차장
시행	예산처-1025	(	2019.04.15.	)	접수		(		)
우	04806	서울특별시 성동구 천호대로 346	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6311-9055	/전송		/	sunny@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격