문서번호	토목부-7440
결재일자	2019.4.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권해엽		장종환	04/29 김영수
협 조
	주무관			황윤기
	주무관			노순재

설계변경(전체4회) 검토 보고

- 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 건설폐기물 처리용역 -

2019.04.

토목부

설계변경(전체4회) 검토 보고

- 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 건설폐기물 처리용역 -

중랑천 초안산 앞 보행교량(한내교) 및 주변시설 개선공사를 완료하고 폐기물 수량 및 용역비에 대하여 실정산하고자 보고드림.

※ 관련근거 : 대콘(초안산) 제19-61호(2019.04.26.)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 건설폐기물 처리용역

○ 용역규모 : 폐기물 운반 및 처리 1,061톤

○ 도 급 비 : 25,130천원

○ 용역기간 : ′16.09.30. ~ ′19.04.30.

○ 용 역 사 : ㈜방태

□ 설계변경 및 주요내용

○ 전체분(4회)                                               (금액 : 천원)

구 분	용 역 금 액 (천원)			용 역 기 간			비고
	당 초	변 경	증 . 감(△)	당 초	변 경	증 . 감(△)
전체 (4회)	******	******	****	********** ************	********** *************	*

○ 설계변경 및 공기연장 사유

- 주변 도로 구조개선 공사 및 주차장 개선공사 완료 후 폐기물 실정산

· 옹벽 및 주차장 울타리(매립부) 철거 수량 감소로 인한 수량 변경

○ 주요 설계변경 내용

구 분	폐기물 종류	폐기물 수량 (ton)			비 고
		당초	변경	증·감
공사 완료 후 폐기물 실정산	폐콘크리트	***	***	******	옹벽 및 주차장 울타리(매립부) 철거수량 감소로 인한 수량변경
	폐아스콘	***	***	*

○ 공사비 변경 현황(전체 3회)

(금액 : 원)

공 종		수량		금 액 (전체분)		증.감	비 고
		당초	변경	당 초	변 경
폐기물 운반	- 폐콘크리트(ton)	***	***	*********	*********	**********	L= 30.0km 이내
	- 폐아스콘(ton)	***	***	*********	*********	*
	- 일반관리비(%)	**	**	*******	*******	***********
	- 이 윤(%)	**	**	*******	*******	***********
폐기물 처리	- 폐콘크리트(ton)	***	***	**********	**********	***********
	- 폐아스콘(ton)	***	***	*	*	*
용 역 비	공급가액			**********	**********	************
	VAT			*********	*********	************
	도급금액			**********	**********	************
용 역 기 간(전체)				‘16.09.30. ~ ‘19.04.30	‘16.09.30. ~ ‘19.04.30	-

□ 조치의견

○ 중랑천 초안산 앞 보행교량(한내교) 및 주변 도로 구조개선공사 중 발생한 폐기물 실물량 정산에 대한 감리단 검토의견이 적정하여 계약금액을 변경 조정하고자 함

붙임  감리단 검토 의견서 등 각 1부.  끝.