문서번호	설비부-6521
결재일자	2019.5.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	임병국	05/03 임정규

『서초역~방배로 간 도로개설 통신공사』

설계변경 검토보고(총차 3회, 2차 1회)

2019. 5.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『서초역~방배로 간 도로개설 통신공사』

설계변경 검토보고(총차 3회, 2차 1회)

『서초역~방배로 간 도로개설 통신공사』와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 설계변경에 대하여 검토하고 보고 드림

1		공사현황

공사개요

❍ 사 업 명 : 서초역~방배로간 도로개설 통신공사

❍ 공사위치 : 서초구 방배동 내방역~서초동 서초역(대법원 앞)

❍ 공사규모 : 도로개선 폭40m(6차로), 연장 1,280m(터널400m)

❍ 주요설비 : 터널방재설비(라디오재방송설비, CCTV설비)

❍ 공사기간 : 2017.03.06 ~ 2019.01.31.

❍ 공 사 비 : 556백만원(도급비 436, 관급비 120백만원)

❍ 감 리 단 : ㈜제일엔지니어링건축사사무소

❍ 시 공 사 : 도영정보통신

2		검토내용

관련근거

❍ 통신공사 설계변경 제출[서방관리 제19-307호(2019.04.29.)]

❍ 실정보고 사항 검토 보고[설비부-437호(2019.01.11.)]

❍ 실정보고 사항 검토 보고[설비부-5455호(2019.04.16.)]

설계변경 내용

❍ 설계변경 사유

- 남부도로사업과 요청에 따른 비상방송설비 설치[기전과-5008호(2018.10.18.)]

- 분전반 위치 변경에 따른 케이블 물량 변경

- 설계도서 누락분 및 현장 여건 반영

❍ 설계변경 내용

구 분		공 사 비			비고
		당 초	변 경	증, 감(-)
도급비	1 차	30,000,000	30,000,000	-	기 준공
	2 차	405,735,000	454,740,000	49,005,000	천단위이하절사
	총 차	436,634,000	484,740,000	48,106,000	천단위이하절사

❍ 설계변경 내용

공 종	내 용	공 사 비			비고
		당 초	변 경	증, (-)감
비상방송설비	남부도로사업소 요청사항 반영	-	38,733,004	38,733,004
라디오재방송설비	현장여건 반영	97,840,077	102,869,637	5,029,560
CCTV 설비	현장여건 반영	49,779,467	55,578,851	5,799,384
비상벨설비	현장여건 반영	38,027,000	30,067,288	-7,959,712
다기능단속카메라	변경없음	120,289,134	120,289,134	-
직접공사비		305,935,678	347,537,914	41,602,236
제 경 비		91,004,322	93,134,814	2,130,492
공 급 가 액		396,940,000	440,672,728	43,732,728
부가가치세		39,694,000	44,067,272	4,373,272
도 급 액		436,634,000	484,740,000	48,106,000

책임건설사업관리기술자 검토의견

❍「서초역~방배로 간 도로개설 통신공사」와 관련하여 시공사에서 요청한 설계변경에 대하여 업무수행지침 제97조(설계변경관리)에 의거 검토한 바 적정하게 산출되었으며, 추후 설계변경에 반영하는 것이 타당함.

검토결과 조치의견

❍ 건설사업관리기술자의 설계변경 기술검토의견 사항을 검토한 결과 검토의견이 적정한 것으로 판단되어 변경계약 시행하여 공정관리에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 건설사업관리기술단 공문 1부.  끝.