문서번호	교통운영과-7926
결재일자	2019.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통개선팀장	교통운영과장
양은범		이유국	전결 05/07 강진동
협조	주무관		김운수
	주무관		차양호

「2019년 도로점용공사장」

교통소통대책 자문회의 결과 보고(제6차)

2019. 5.

교통운영과

「2019년  도로점용공사장」

교통소통대책 자문회의 결과 보고(제6차)

제6차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 ’19.5.2.(목)에 개최하고 그 결과를 보고 드림

□ 자문회의 개요

○ 개최일자 : 2019. 5. 2.(목) 15:00 ~ 18:30

○ 장    소 : 서울시청 서소문별관 1동 7층 회의실

○ 참석위원 : 8명 (당연직 : 1명, 위촉직 : 7명)

- 당연직 : 서울지방경찰청 교통시설운영계장

- 위촉직 : 송두석 위원, 신건철 위원, 이동원 위원, 정필현 위원, 박규영 위원, 홍지연 위원, 김지현 위원

- 간  사 : 교통개선팀장

○ 자문대상 및 결과 : 총 9건

- 결  과 : 원안가결 2건, 조건부 시행 6건, 재심의 1건

□ 자문회의 결과

○ 공통사항

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

1) 남부순환로 평탄화 공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
남부순환로	2016.3.25 ∼ 2019. 6.30	24시간	1~2개 차로	도시기반시설본부 토목부

○ 자문결과 : 원안가결

2) 신길5 재정비 촉진구역 주택재개발 사업

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
가마산로	2019.5.20. ~ 8. 8.	24시간	1개차로	신길5재정비촉진구역 주택재개발사업조합

○ 자문결과 : 원안가결

3) 2019년 하계배수분구 하수관로 종합정비공사(3-2공구)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
덕릉로, 동일로, 노원로,한글비석로	2019.5.20. ∼7.20	야간 (22~06)	1~2개 차로	노원구 치수과

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 동일로 1, 7단계, 덕릉로 4단계 장비 배치 재검토

- 동일로 2, 3단계 좌회전시 사고위험성이 있으므로 통제수 배치

- 동일로 8단계 노면표시 추가 및 테이퍼를 조정하기 바람.

- 동일로 9단계 유턴 시야확보를 위해 공사면적을 변경하기 바람.

- 동일로 10단계 차로운영 재검토하기 바라며 통제수 배치

4) 수도권 광역급행철도 A노선 민간투자사업(서울역 구간)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
한강대로	2019.5 ~2024.4	24시간	1~2개 차로	에스지레일 주식회사

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 서울역 모듈역 버스정류소를 바닥과 고정하여 공사를 시행하기 바람

- 서울역 1단계 공사시 보행량이 많은 구간으로 통제수 배치.

5) 동대문구 관내 상수도공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
시립대로, 전농로	2019.5.15. ~ 9.30	야간 (23~06)	1~2개 차로	동부수도사업소 시설관리과

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 전진 개착시 시·종점부, 횡단보도에 대한 점용면적과 처리대책 추가

- 안전지대 이용 구간(시립대로 등)에 안내표지판을 추가 설치

- 우회전 전용 구간(전농로)은 직진금지 노면표시를 설치하시기 바람

- 임시 유도선 설치 및 홍보방안을 감안, 시립대로 1,2 단계 차로운영 계획 조정 시행

- 전농로 2단계 교차로 운영(비보호 좌회전) 방안을 재검토

- 전농로 12단계 원활한 좌회전 진입을 위해 통제수를 배치

- 전농로 14단계 점용면적을 축소하여 우회전 차량의 회전 공간 확보

6) 가산동 141-13 ~ 독산동 152-8 배급수관 정비공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
가산로, 독산로	2019.6.1.~ 11.30.(183일)	야간 (22~06)	1~2개 차로	남부수도사업소 급수운영과

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 전진 개착시 시·종점부에 대한 점용면적과 처리대책을 추가하시기 바람

- 안전지대 이용 구간에 안내표지판을 추가 설치하시기 바람

- 우회전 전용 구간은 직진금지 노면표시를 설치하시기 바람

7) 서부간선도로 ~ 월드컵대교 직결 연결로 설치 공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
서부간선도로, 노들로, 성산대교	착공일로부터 24개월	24시간	1~2개 차로	도시기반시설본부 토목부

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 공사로 인해 보행이 단절되는 구간은 사전에 충분히 안내하여 혼란 방지

- RAMP B 2단계 서부간선도로에서 노들로 진입 시 가속차로 설치를 검토 하시기 바람(차로 재조정 등)

8) 안국동사거리~조계사 앞 교차로 송배수관 정비공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
우정국로, 율곡로	2019.5.15. ~9.16.(64일)	야간 (22~06)	1~3개 차로	중부수도사업소 시설관리과

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 1구간 3·4단계 작업 구간을 조정하여 차로운영계획을 재수립하시기 바람

- 2구간 5단계 공사 구간을 조정하여 유턴을 허용하는 방안 검토

- 교차로 구간은 교통량 분석 후 24시 이후 공사를 시행하는 방안 검토

- 교통소통에 문제가 없을 시 안전한 공사를 위해 2개차로를 점용하여 공사하는 방안에 대해 검토

- 투입 장비제원 제시

9) 노원구민회관 송배수관 및 쌍문동 배급수관 정비공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
동일로, 노해로	2019.5.7. 11.10.(157일)	야간 (22~06)	1~2개 차로	북부수도사업소 급수운영과

○ 자문결과 : 재심의

- 1일 공사상세도 오기를 수정하시기 바람

- 단면도와 공사중 처리계획이 상이한 부분 수정

- 전 구간 유도선 및 노면 표시 수정

- 전구간 공사 장비 제원에 따라 공사 점용 면적 재산정

- 전구간 측구 0.3m 이상 확보

- 제어지체 100초/대 이상인 구간은 공사시간 및 차로 운영계획 재검토

- 1구간 1-2단계 버스정류장 위치 조정

- 1구간 1-3단계 차로운영계획을 재검토 하시기 바람

- 1구간 3-8단계 및 2구간 3-5단계 차로 운영 방안을 재검토 하시기 바람

- 1구간 3-9단계 및 5단계 테이퍼 길이 조정하시기 바람

- 2구간 3-3단계 테이퍼 조정 등 차선 변경이 가능하도록 차로 확보

붙임  1. 자문위원 참석 명단 1부.

2. 공사업체 참석 명단 1부.  끝.