의  결  안

제 2019-3회 위 원 회
년 월 일	2019년 05월 09일	의안번호	제1~3호
의 제	항동지구 광역상수도 및 재이용수관로공사 변경 검토 외 2건

1. 제안부서 : 도시공간사업본부 도시조성부

2. 제안근거 : 우리공사 설계변경심사위원회 운영기준(2016.02)

3. 제안사유

○ 의안 제1호 -「항동지구 광역상수도 및 재이용수관로공사 변경 검토」
항동지구 내 광역상수도 및 재이용수 부설공사 시행 중 변경사항을 반영에 대한 설계변경 타당성 및 낙찰율 산정의 적정성 부의

- 소요예산 : 762,779천원(부가세 및 지급자재비(37,165천원) 포함))

○ 의안 제2호 -「항동지구 상수도 폐관 충진공사 검토」
항동지구 역곡천 내 광역상수도 및 재이용수관로 신설공사 후 기존 관로의 철거가 불가한 구간에 대하여 폐관 후 기존관로 파손에 따른 지반 침하 등 방지를 위한 충진공사에 대한 설계변경 타당성 및 낙찰율 산정의 적정성 부의

- 소요예산 : 211,308천원(부가세 포함)

○ 의안 제3호 -「항동지구 도로안내표지판 설치 검토」
구로구 교통행정과의 도로안내표지판 문안심의 결과에 따라 항동지구 내 도로 조성에 따른 도로안내표지판 설치공사 타당성 및 낙찰율 산정의 적정성 부의

- 소요예산 : 673,754천원(부가세 및 지급자재비(251,755천원) 포함))

※ 총 소요예산 :  1,647,841천원(제경비, 부가세, 지급자재 포함)

4. 심사․의결사항 : 설계변경 타당성 등

※ 의안 제1~3호 신규품목에 대한 견적발주부 기술심사 검토결과 반영

[견적발주부-639호(2019.04.29)]

제2019-3 위원회를 개최하고 위의 내용과 같이 심사․의결 하였음.

2019년  05월  09일

위 원 장 :	도시공간사업본부	본부장	김 소 겸	□
부위원장 :	도시공간사업본부	도시공간사업처장	박 광 균	□
위 원 :	도시공간사업본부	도시공간기획부장	남 시 명	□
위 원 :		도시설계부장	백 용 철	□
위 원 :		기반시설부장	노 병 철	□
위 원 :		도시개발계획부장	이 상 협	□
위 원 :	건설사업본부	견적발주부장	조 진 래	□
위 원 :	기획조정실	재정관리부장	이 태 종	□
위 원 :		예산자금부장	민 동 조	□

제 2019-3회 위원회 서면 결의서

의  제 : 항동지구 광역상수도 및 재이용수관로공사 변경 검토 외 2건

표제의 사항을 위원회에 부의하지 아니하고 서면으로 동의를 얻어 시행코자 하오니 찬반여부를 아래에 기명 날인하여 주시기 바랍니다.

의결사항 : 항동지구 광역상수도 및 재이용수관로공사 변경 검토 외 2건에 대하여 설계변경 타당성 및 비목별 단가적용 적정성 등 원안가결

구 분	성 명	찬 성	반 대	비 고
위 원 장	김 소 겸
부위원장	박 광 균
위 원	남 시 명
위 원	백 용 철
위 원	노 병 철
위 원	이 상 협
위 원	조 진 래
위 원	이 태 종
위 원	민 동 조

2019년  05월  09일

위  원  장           김  소  겸    □