투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	건설사업관리용역 설계변경 및 준공기한 연기(총차3회, 4차1회)계약의뢰

1. 토목부-7872호(2019. 5. 7.)와 관련임.

2. 우리 본부에서 시행중인 “남부순환로(개봉1동사거리 주변) 평탄화공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역”에 대하여 아래와 같이 설계변경 및 준공기한 연기(총차3회, 4차1회)계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 남부순환로(개봉1동사거리 주변) 평탄화공사 감독권한대행등 건설사업관리용역

나. 용역기간 : ‘16. 4.14. ~ ‘19. 5.13.(4차 : ‘19. 1. 2. ~ ‘19 5.13.)

다. 용 역 비 : 전체1,560,700천원(4차 :158,000천원)

라. 도 급 자 : ㈜동일기술공사외 3사

마. 설계변경 및 준공기한 연기 내역

(금액단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
총차 (3회)	용 역 비	1,560,700,000	2,271,300,000	증)710,600,000
	용역기간	‘16. 4.14. ~‘19. 5.13.	‘16. 4.14. ~‘19. 5.13.	증)21개월
4차 (1회)	용 역 비	158,000,000	500,000,000	증)342,000,000
	용역기간	‘19. 1. 2. ~ ‘19. 5.13.	‘19. 1. 2. ~ ‘19.12.31.	증)7.4개월

바. 사유 : 시설공사 준공기한 연기에 따른 건설사업관리 기술자 현장배치 조정

붙 임 : 1) 설계변경 및준공기한 연기 검토보고서 1부.

2) 관련공문 1부.

3) 변경 내역서 각 1부.

4) 합의서 각 1부.  끝.

	토목부장
주무관	이한규		광역도로과장	박일연		토목부장	05/08 김영수
협조자
시행	토목부-7973	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2556	/전송	02-3708-2599	/	lhg2023@seoul.go.kr	/	대시민공개