“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(준공기한 연기)

우리 부서에서 시행 중인 ‘상도터널 확장 타당성조사 용역’에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 상도터널 확장 타당성조사 용역

2. 계 약 자 : ㈜서우티이씨

3. 준공기한 연기내역

구 분	당 초	변 경	비 고
준공 기한	2019년 5월 17일	2019년 6월 28일

4. 귀책사유 : 서울특별시

5. 연기사유 : 용역 성과품의 완성도 제고를 위한 관련 기관(부서) 협의와 교통량, 교차로 구조 등 현황 조사 및 개선 대안 보완 등을 위하여 과업 기간 연장

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기방침서 1부.

3. 용역계약 변경합의서 1부.  끝.

	도로계획과장
주무관	이승헌		간선도로계획팀장	김경호		도로계획과장	05/09 안대희
협조자
시행	도로계획과-6466	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 도로계획과 (태평로1가)	/
전화	02-2133-8077	/전송	02-2133-0763	/	sh0123@seoul.go.kr	/	대시민공개