문서번호	토목부-8109
결재일자	2019.5.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상근		여용석	05/10 김영수
협조

설계변경 검토보고(전체 4회, 3차 1회)

- 성산대교(남·북단) 성능개선공사 외 1개소 건설사업관리용역 -

2019. 05.

도시기반시설본부

(토 목 부)

설계변경 검토보고(전체4회, 3차 1회)

- 성산대교(남·북단) 성능개선공사 외 1개소 건설사업관리용역 -

성산대교(남·북단) 성능개선공사 시행 중 공사 설계변경으로 공사비가 증액되어 건설사업관리 업무량이 증가되었는바, 이에따른 건설사업관리용역의 설계변경이 필요하여 검토보고 드림.

Ⅰ		관련근거

○ 도화(감리)2019-8070(2019. 5. 2.) : 건설사업관리용역 설계변경 승인 요청

Ⅱ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 성산대교(남·북단) 성능개선공사 외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 용역기간 : 2017. 02. 27. ~ 2020. 02. 11.

○ 용 역 비 : 2,249,100천원

○ 감 리 사 : ㈜ 도화엔지니어링 외 2개사

Ⅲ		검 토 내 용

○ 공사비 변동사항

【금액단위 : 백만원】

구 분		공사비(VAT 포함)			증가율	비고
		당 초 (추정 공사비)	변 경 (확정 공사비)	증·감
합계		45,700	64,777	증)19,077	41.74%	E/S
성산대교	소계	39,350	59,027	증)19,077
	북단	-	34,177
	남단	-	24,850
퇴계로	계	5,750	5,750

※ 공사비는 공사 예정가격 결정의 근거가 되는 금액임.

○ 건설사업관리 설계변경 내용

【금액단위 : 천원】

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
전체 4회	용 역 비	2,249,100	2,589,100	340,000
	용역기간	‘17. 2. 27. ~ ‘20. 2. 11.	‘17. 2. 27. ~ ‘20. 2. 11.	변경없음
3차 1회	용 역 비	629,000	982,000	353,000
	용역기간	‘19. 1. 1. ~ ‘19. 12. 31.	‘19. 1. 1. ~ ‘19. 12. 31.	변경없음

○ 건설사업관리 설계변경 내용

구분	분야/등급		건설사업관리기술자 투입기간				수량 (인·월)	증·감
			2017년	2018년	2019년	2020년
총괄	단장	당초	2/27			2/11	41.83
		변경	2/27			2/11	41.83
	토목 (공무)	당초	3/02~20 11/07		9/30		23.41
		변경	3/02~20 11/07		12/31		26.41	3.00
북단	토목 (공사)	당초	2/27		5/31		22.06
		변경	2/27		11/30		26.94	4.88
남단	토목 (공사)	당초	7/01 10/31	1/19	4/25		15.68
		변경	7/01 10/31	1/19	12/31		22.31	6.63
공통	안전	당초	11/13		4/30		14.39
		변경	11/13		12/31		20.90	6.51
	강교		11.07	2/28 11/28	1/31		4.74
			11/07	2/28 11/28	1/31 4/03 8/20		8.40	3.66
	전기	당초			4/1 6/30		2.00
		변경			9/01 10/31		2.00
	조경	당초			4/1 6/30		1.63
		변경			9/01 10/31		1.63
퇴계로	토목	당초	4/01 12/31				6.51
		변경	4/01 12/31				6.51
	안전	당초	3/13 11/12				6.51
		변경	3/13 11/12				6.51
합 계		당초					163.16
		변경					188.80	25.46

Ⅳ		조 치 의 견

○ 공사비가 설계변경으로 증액되어 예정가격 결정의 근거가 되는 금액으로 환산한바 추정공사금액 보다 41.74%가 증액되어 건설기술용역대가 등에 관한 기준 제7조①의2항에 의거 설계변경을 시행하고자 함.

※ 건설기술용역대가 등에 관한 기준 제7조①의2항

- 추정공사금액(당초) 보다 10% 이상 증·감시 대가 조정

붙 임  1. 감리단 관련공문 1부.

2. 감리설계변경 내역서(전체 4회, 3차 1회) 1부.  끝.