문서번호	설비부-7035
결재일자	2019.5.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
조윤제		代이강욱	05/14 代여인웅
협조

『시립 중랑노인전문요양원 증축 기계설비공사』

관급자재(EHP) 납품기한 연기 검토보고

2019. 05.

도 시 기 반 시 설 본 부

[설 비 부]

『시립 중랑노인전문요양원 증축 기계설비공사』

관급자재(EHP) 납품기한 연기 검토보고

“시립 중랑노인전문요양원 증축 기계설비공사” 와 관련하여 감리단으로부터 제출된 EHP 납품기한 변경을 검토 보고 드림.

1		공사개요

□  공 사 명 : 시립 중랑노인전문요양원 증축 기계설비공사

□  규    모 : 지하 1층/지상 5층, 연면적 2,243m2(증축부)

□  공사기간 : `18.3.28~`19.6.30

□  공 사 비 : 565,129,270원

□  감 리 사 : ㈜펨코엔지니어링 건축사사무소

□  시 공 사 : ㈜경동씨앤씨개발

2		관련근거

□  PC19(시립요양원)-383(`19.5.13.) : 관급자재(EHP) 납품기한 연기 기술검토보고

3		납품기한 연기내용

□  납품기한 연기 내용

품 명	계약금액	계 약 자	납품기한
			당 초	변 경
******	***********	*******	`19.05.19	`19.06.30
******	***********	*******	`19.06.17	`19.06.30

□  연기사유 : 선행공종(건축) 준공 일정상 관급자재 납품시기 미도래

□  귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부 (지체상금 : 미부과)

4		보고자 조치의견

□ 위 내용과 같이 관급자재 납품시기를 조정하여 적기에 수급 가능

하도록 계약부서에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙 임 : 감리단 공문 1부. 끝.