문서번호	도시철도토목부-4983
결재일자	2019.5.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
김민수		방영복	05/14 정대현
협 조
	토목3과장			호경수
	주무관			장대성
	주무관			代임경태

「진접선(4호선연장) 차량기지 1,2공구 건설공사」

통합공정회의 개최결과 보고

2019.  5.

「진접선(4호선연장) 차량기지 1,2공구 건설공사」

통합공정회의 개최결과 보고

「진접선(4호선 연장) 차량기지 1,2공구 건설공사」의 원활한 사업추진과 효율적인 공사 관리를 위해 통합공정회의를 개최하고, 그 결과를 보고드림.

□ 회의개요

❍ 일    시: 2019.05.07.(화), 14:30~16:30

❍ 장    소: 진접선 1공구 현장사무실

❍ 대상현장: 진접선 1공구, 진접선 2공구

❍ 참 석 자

- 본  부: 도철토목부장, 토목2과장, 토목3과장, 공사관리관 3

- 현  장: 각 공구 단장 및 소장

□ 보고내용

❍ 각 공구 사업 추진현황 보고 (책임건설사업관리기술자)

□ 공정회의 결과

❍ 설계도서 검토: 다음주 원설계자 참석 합동 검토회의(1공구)

❍ 지적도근점과 측량기준점 이격에 따른 용지 검토: 지적 분할도를 기준으로 시공추진(1공구)

❍ 차량기지 사업계획변경 및 용지보상은 담당자가 관계기관과 협의하여 원활하게 진행될수 있도록 관리바람(2공구)

❍ 차량기지 우수(배수)계획 및 배수로 재검토 바람(2공구)

공 정 회 의(현장사무실 1)

공 정 회 의(현장사무실 2)

□ 행정사항

❍ 서울시와 한국감정원에서 감정평가 및 보상액 산정 관련한 행정적 절차 빠르게 진행 될 수 있도록 협조 요청