문서번호	설비부-7128
결재일자	2019.5.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
백남진		代이강욱	전결 05/15 임정규
협조
	주무관		조윤제

『중랑노인전문요양원 증축 기계·전기공사』

준공기한 연기 검토보고(총차, 2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5.

도시기반시설본부

(설 비 부)

준공기한 연기 검토보고(총차, 2차)

「중랑노인전문요양원 증축 기계·전기공사」

「중랑노인전문요양원 증축 공사」대하여 건설사업관리단으로 부터 공사기간 연기보고서가 제출되어 검토하고 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

□ 실정보고[중랑노인전문요양원 증축 전기공사] : PC19(시립요양원)제385(2019.5.15.)

□ 실정보고[중랑노인전문요양원 증축 기계공사] : PC19(시립요양원)제386(2019.5.15.)

Ⅱ		공사개요

공 사 명	중랑노인전문요양원 증축 전기공사	중랑노인전문요양원 증축 기계공사
공사기간	총 차 : 2017.11.30.~2019.05.29. 2 차 : 2019.01.10.~2019.05.29.	총 차 : 2018.03.28.~2019.06.30. 2 차 : 2019.01.10.~2019.06.30.
도 급 비	총 차 : 460,063,040원 2 차 : 260,063,000원	총차 : 565,129,270원 2 차 : 365,129,270원
시 공 사	동진전설 ㈜ 대표 박영광	㈜ 경동씨앤씨개발 대표 조현서
감 리 사	㈜ 펨코엔지니어링	㈜ 펨코엔지니어링

Ⅲ		검토내용

□ 공사기간 연기사유

선행공종인 건축분야의 공기연장으로 조명설비 및 기계설비 등 후속공정인 전기·기계공사의 공사기간 절대부족

□ 공사기간 연기

○ 공사명 : 기계공사

(단위 : 원)

구 분	당 초		변 경
	총차	2차	총차	2차
도 급 비	565,129,270	365,129,270	변동없음	변동없음
공사기간	2018.03.28. ~2019.06.30.	2019.01.10. ~2019.06.30.	2018.03.28. ~ 2019.07.19.	2019.01.10. ~ 2019.07.19.
연장일수			- 기한연기 : 총차 및 1차 19일(증) - 총차 및 계약금액 변동없음

○ 공사명 : 전기공사

(단위 : 원)

구 분	당 초		변 경
	총차	2차	총차	2차
도 급 비	460,063,040	260,063,040	변동없음	변동없음
공사기간	2017.11.30. ~2019.05.29.	2019.01.10. ~2019.05.29.	2017.11.30. ~ 2019.07.19.	2019.01.10. ~ 2019.07.19.
연장일수			- 기한연기 : 총차 및 2차 51일(증) - 총차 및 계약금액 변동없음

□ 선행공정(건축분야) 공사기간 연기로 후속공정인 전기·기계공사의 작업 등이 기한내 작업 할 수 없는 여건으로 공기연장함이 적정 함.

Ⅳ		검토결과

□ 건설사업단의 공사기간 연장 검토보고가 적정하여 현장여건에 맞게 공사기간을 연장하여 공정관리에 만전을 기하고자 함.

붙   임 : 공사기간 연장요청 검토의견서(전기,기계) 각 1부.  끝.