“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	치수과-9437		주무관	하수팀장		치수과장		안전교통국장
			김지훈	권대현		윤석빈		전결 05/16 이철
등록일자	2019.5.15.
결재일자	2019.5.16.
공개구분	부분공개(5)
			협조자
					재무과장		이준택
					계약팀장		이영순

『2019년 관내 빗물받이 신설 및 개량공사(연간단가)』

설계변경 시행계획(1차)

공사개요

공 사 명 : 2019년 관내 빗물받이 신설 및 개량공사(연간단가)

공사규모 : 빗물받이 설치(1호) 135개소, 빗물받이 설치(2호) 51개소 등

도 급 비 : 441,260천원[도급자 : ㈜민유건설]

공사기간 : 2019.2.21.~2019.12.31.

설계변경 사유

노후 빗물받이 정비요청 민원해소를 위한 공사물량 증가

빗물받이 확충 및 이설을 위한 시비 재배정

공사비 변경내역                                               (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비	509,744,740	577,744,740	증) 68,000,000
도 급 비	441,260,740	504,320,000	증) 63,059,260
관 급 비	26,010,830	43,009,000	증) 16,998,170
이 전 비	42,473,170	30,415,740	감) 12,057,430

2019. 5.  .

	강 남 구
(		치수과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제22조 • 같은법 시행령 제74조 제1항
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 민원사항 처리
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 사업지 주변 주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당없음

『2019년 관내 빗물받이 신설 및 개량공사(연가단가)』

설계변경 시행계획(1차)

우리구에서 시행중인 『2019년 관내 빗물받이 신설 및 개량공사(연간단가)』에 대하여 빗물받이 확충 및 이설을 위한 시비 재배정 및 시공물량 증·감사항이 있어 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

빗물받이 확충 및 이설사업 추진계획[치수과-9251호(2019.05.14.)]

Ⅱ		사 업 개 요

공 사 명 : 2019년 관내 빗물받이 신설 및 개량공사(연간단가)

위    치 : 관내 전지역

사업기간 : 2019.02.21.~2019.12.31.

규    모 : 빗물받이 설치(1호) 135개소, 빗물받이 설치(2호) 51개소 등

총사업비 : 509,744천원

※ 도급비 441,260천원, 관급비 26,010천원, 이전비 42,474천원

도 급 자 : ㈜민유건설  대표 조용신

Ⅲ		보 고 내 용

설계변경 사유

빗물받이 확충 및 이설사업 시비 재배정(68,000천원)

빗물받이 보수요청 민원에 따른 공사물량 증가

공사비 증·감 내역                                           (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총공사비		509,744,740	577,744,740	증) 68,000,000
도 급 비	공급가액	401,146,128	458,472,728	증) 57,326,600
	부 가 세	40,114,612	45,847,272	증) 5,732,660
	계	441,260,740	504,320,000	증) 63,059,260
관 급 비		26,010,830	43,009,000	증) 16,998,170
이 전 비		42,473,170	30,415,740	감) 12,057,430

주요물량 증·감 내역

공 종	단위	수 량		증ㆍ감	비 고
		당 초	변 경
빗물받이 설치 (1호, 300×400)	개소	135	166	증) 31
빗물받이 설치 (2호, 300×900)	개소	51	164	증) 113
횡단하수거(무소음, 400×2000)	개소	30	11.5	감) 18.5
아스콘 표층공(T=5㎝)	a	7	5.04	감) 1.96

Ⅳ		조 치 계 획

위 보고내용과 같이 설계변경 후 사업시행하여 침수예방 및 주민생활 불편해소에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1) 관련방침 1부.

2) 설계변경내역서 1부.

3) 제비율 검증결과 1부.  끝.