문서번호	교통운영과-8799
결재일자	2019.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통개선팀장	교통운영과장
박평근		이유국	05/20 강진동
협조
	주무관		양은범

「2019년 도로점용공사장」

교통소통대책 자문회의 결과 보고(제7차)

2019. 5.

교통운영과

「2019년  도로점용공사장」

교통소통대책 자문회의 결과 보고(제7차)

제7차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의를 ’19. 5.16.(목)에 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 자문회의 개요

○ 개최일자 : 2019. 5. 16.(목) 15:00 ~ 18:00

○ 장    소 : 서울시청 서소문별관 1동 7층 회의실

○ 참석위원 : 12명 (당연직 : 2명, 위촉직 : 10명)

- 당연직 : 교통운영과장, 서울지방경찰청 교통안전계장

- 위촉직 : 송두석 위원, 신건철 위원, 이동원 위원, 정필현 위원, 박규영 위원, 고진영 위원, 박종란 위원, 이경아 위원, 김봉찬 위원, 김정환 위원,

- 간  사 : 교통개선팀장, 교통안전팀장

○ 자문대상 및 결과 : 총 9건

- 결  과 : 원안가결 1건, 조건부 시행 7건, 재심의 1건

□ 자문회의 결과

○ 공통사항

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

1) 노원구민회관 송배수관 및 쌍문동 배급수관 정비공사(재심의)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
동일로, 노해로	2019.05.22. ∼11.14.	야간 (22~06시)	1~2개 차로	북부수도사업소 급수운영과

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 교차로 공사시 굴착장비의 회전반경을 고려한 안전 조치후 공사를 시행 하기 바람

- 배급수관 크기에 따른 굴착 표준도를 제시하기 바람

- 1구간 4단계 공사시 노선버스가 지하차도를 안전하게 진입이 가능하도록 테이퍼를 조정하기 바람

2) 청구역~신당역간 송배수관 정비공사 외3건

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
다산로, 난계로, 마장로	2019.05.27. ∼09.05.	야간 (22~06시)	1~2개 차로	중부수도사업소 급수운영과

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 교통량 오기 부분을 수정하기 바람

- 보도 공사시 복구전에는 부직포 등을 설치하여 보행자의 불편을 최소화 할 수 있도록 하기 바람

- 난계로 5단계 공사시 우회전 노면표시 및 안내표지판을 설치하기 바람

- 마장로 2-1단계 공사는 교통량을 감안, 23시 이후 공사를 시행하기 바람

- 횡단보도 공사는 반폭공사를 검토하기 바람

- 보도 공사시 보도공사에 따른 안내입간판을 설치하기 바람

- 마장로 공사시 교대통행이 필요한 경우 통제수를 배치하기 바람

3) 북부간선고가교 외 2개소 보수공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
북부간선도로, 동부간선도로	2019.06.01.∼ 11.30.	야간 (22~06)	1개 차로	서울시설공단 도로시설처

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 공사시 테이퍼는 하위차로에서 차로 변경이 가능하도록 설치하기 바람

- 우회처리 안내도를 각 방향별로 설치하여 홍보를 강화하기 바람

- 램프 차단시 현수막 등을 사전에 설치하기 바람(램프차단 10일전부터)

- 북부간선도로는 교통량이 상시 많은 도로이므로 공사시 공사는 24시 이후에 시행하기 바라며, 공사 종료 시간도 30분정도 일찍 끝내 차량이 통행할수 있도록 하기 바람

4) 덕은지구 열수송관공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
월드컵로, 제2자유로	4개월	야간 (22~06)	2개 차로	한국지역난방공사 중앙지사열수송시설부

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 14단계, 17~18단계 공사시 공사차량 위치 조정 등을 통해 공사를 시행하기 바람

5) 옥수, 금호터널 보행환경 개선공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
동호로	2019.05.27. ∼12.31.	야간 (22~06)	1~2개 차로	성동도로사업소 시설보수과

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 차로수가 줄어드는 사항에 맞게 차로 운영계획에 입간판을 표기하여 설치하기 바람

- 공사시 2개팀이 동시에 공사를 시행하여 공사기간을 단축 방안 검토

6) 고덕3단지 아파트 정비기반시설공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
고덕로, 상일로	‘19.06.01.∼ ‘20.02.29	24시간	1~2개 차로	고덕3단지아파트 재건축 조합

○ 자문결과 : 재심의

- 도면에 굴착 관로를 표기하기 바라며, 1단계 공사시 오수관로 연계시 기존관로와 연결 관로를 표기하기 바람

- 도로별로 쉬운 공사부터 시행하는 방안을 검토하기 바람

- 1단계 공사시 지하철 공사위치와 중복되므로 노면표기, 신호운영, 유도선 표기를 지하철 공사와 연계하여 공사중 교통처리대책을 수립하기 바람

- 지하철 공사 구간과 중복되는 교차로는 황색신호를 연장하기 바람

- 정비 사업내부 공간을 활용하여 도로 점용를 최소화하여 공사중 교통대책을 재수립하기 바람

- 완공후 도면을 제출하기 바라며, 정비공사 마무리 일정과 맞춰 정비기반시설공사를 시행하여 도로점용 공사범위를 최소화하기 바람.

7) 양평동4가 323~당산동5가 32-1번지간 외 3개소 송배수관 정비공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
양평로	49일	야간 (22~06)	1~2개 차로	남부수도사업소 시설관리과

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 16,17단계 공사시 이면도로를 점유하여 굴착하기 바람

- 13, 14단계 공사시 굴삭기 장비를 재배치하여 공사를 시행하기 바람

- 27단계 공사시 대향차로를 활용하여 공사를 시행하여 교차로의 정체를 줄일 수 있는 방안 강구하기 바람

- 27~29단계 공사시 유턴이 가능하도록 공사를 시행하기 바람

8) 한남IC~압구정역 간 송배수관 정비공사(재심의)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
압구정로	2019.05.01.∼ 12.31.	야간 (22~06)	1~2개 차로	강남수도사업소 급수운영과

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 공사시 회전이 금지된 차로는 공사안내 입간판 설치 및 노면표시를 추가하여 공사를 시행하기 바람

9) 세운상가군 재생사업 공공공간 조성공사(변경)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
퇴계로, 을지로	‘18.12.05.∼ ‘20.10.07.	24시간	1~2개 차로	역사도심재생과

○ 자문결과 : 원안 가결

붙임  1. 자문위원 참석 명단 1부.

2. 공사업체 참석 명단 1부.  끝.