국회의원 요구 자료 제출

시 행	물재생계획과-7189	(		)
접 수		(		)
결재일자	2019.5.21.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	물순환정책과장,기획담당관

주무관	하수관리팀장	물재생계획과장	물순환안전국장		결재
강신욱	代김병오	代김준형	05/21 이정화
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 826번, 진선미 의원, 더불어민주당)

1. 국회의원 요구번호 826번(2019.5.20)과 관련입니다.

2. 보건복지위원회 진선미 의원(더불어민주당, 서울 강동구갑)으로부터 요구된 자료를  붙임과 같이 제출합니다.

붙임 :  국회의원 요구자료 1부.  끝.

진선미 의원(보건복지위원회, 더불어민주당, 서울 강동구갑)

요구번호 826번

4. 암사 하수암거 신설 추진 현황 개요

암사역주변 하수암거 신설공사

2010,11년 집중호우 시 침수된 암사동 및 천호동 지역에 하수암거 신설 및 성능개선을 통하여 침수피해를 저감하기 위한 사업임

□ 사업개요

❍ 위    치 : 강동구 암사역 주변(선사로사거리~천호빗물펌프장)

❍ 규    모 : 하수암거 신설 (□1.8×1.5m~2□3.0×2.0m, L=1,975m)

❍ 사업기간 : 2014. 4 ~ 2018.12(사업 완료)

❍ 총사업비 : 272억원

- 연차별 예산현황                                       (단위 : 억원)

연도별	계	기투자	’17년	’18년	비 고
예산액	272	154	45	73

□ 추진현황

❍ 2014.  4. ~ 2015.11.  : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2015.12. ~ 2016.12. : 1공구 구간(L=783m) 암거 설치 완료

❍ 2016. 5. ~ 2018.12. : 2공구 구간(L=1,072m) 암거 설치 완료

❍ 2018.12. 20.          : 공사 준공

※ 2공구 중 별내선 건설공사와 중복구간(암사119안전센터~선사사거리, L=120m)발생, 2021. 8월 별내선 건설공사 완료 시기에 서울시 도시기반시설본부에서 시행 예정

□ 위 치 도

1공구

2공구

2021.8월예정(별내선중복구간)

□ 현황 사진

하수암거 설치	하수암거 설치 후 포장 완료

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (물재생계획과)	담당사무관	이한복
	☎2133-3790	주무관	강신욱
	작 성 일 : 2019. 5. 21.

이곳에 본문을 입력하세요