문서번호	설비부-7520
결재일자	2019.5.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
김현욱		여인웅	05/23 代여인웅
협조

「올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 통신공사」

설계변경(총차 및 3차) 검토 보고

2019. 05.

도시기반시설본부

[설 비 부]

「올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 통신공사」

설계변경(총차 및 3차) 검토 보고

『올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 통신공사』설계변경(총차 1회, 3차 1회) 요청이 있어 아래와 같이 검토 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

이산 2019-2270(2019.05.16.), 설계변경(총차1회, 3차1회) 검토 보고

Ⅱ		공사개요

공 사 명 :『올림픽대교 남단 IC 연결램프 구조개선 통신공사』

공사위치 : 서울시 올림픽 대교 (강남지역) 일대

공사기간 : (총차)`17.07.11.~`20.03.25. (3차)`19.01.18.~`19.12.31.

공사규모 : 램프신설 L=1,383m, 램프이설 : L=1,309m(교량 139m포함)

공사내용 : 가로등 철거 및 설치, 교량점검등 설치 등

도 급 비 : (총차)1,030백만원, (3차) 173백만원

시 공 사 : (주)한포넷

감 리 사 : ㈜이산 외 2개사

Ⅲ		검토내용

설계변경 사유

□ 설계변경 소위원회 자문회의 조치결과 반영

- 심의일시 : 2019.04.30.

- 심의내용

주요변경사항	심의금액	심의결과	증ㆍ감액	비 고
문형식 구조물, 무인단속카메라 설치 및 철거	84,837천원	75,247천원	감)9,590천원

계약변경 내용                                          (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증·감액	비 고
계약기간	총차	2017.07.11.~ 2020.03.25.	2017.07.11.~ 2020.03.25.	변경없음
	3차	2019.01.18.~ 2019.12.31.	2019.01.18.~ 2019.12.31.	변경없음
계약금액	총차	1,029,932,841	1,105,180,000	증)75,247,159
	3차	172,643,000	199,344,000	증)26,701,000

감리단 검토의견

□ 금번 설계변경 사유는  문형식 구조물, 무인 단속카메라 철거 및 설치공정의 원설계 누락에 대한 설계반영으로서 설계심의를 절차를 득하였으며,

□ 금번 설계변경 검토결과 적정하게 산출된것으로 사료되며, 3차분 통신공사 예산 확보는 금년예산 한도내에서 토목공사비를 조정하여 확보함이 타당할 것으로 사료됨.

Ⅳ		검토결과

책임 건설사업관리기술자가 검토한 설계변경(총차 및 3차) 내용이 적합한 것으로 판단되어 총무부에 설계변경 계약을 의뢰하고자 함.

붙임  감리단 공문 1부.  끝.