문서번호	건축부-8756
결재일자	2019.5.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
김동석		代김찬유	05/24 임인구
협 조
	주무관			김수진
	주무관			윤대영
	주무관			정유진

『서울시 근로자복지관 증축 공사』

예비준공검사 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『서울시 근로자복지관 증축 공사』

예비준공검사 시행계획

「서울시 근로자복지관 증축 공사」의 준공 전 합동 예비준공 검사를 실시하여 준공 및 공사 추진에 차질이 없도록 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 서울시 근로자복지관 증축공사

□ 위    치  : 영등포구 국회대로44길 10 (영등포동7가, 한국노총 서울지역지부)

□ 규    모  : 지하 1층/지상 6층, 연면적 3,768.24㎡

□ 용    도  : 노유자시설(근로복지시설)

□ 공사기간  : ‘18.10.01. ~ ’19.06.21.

□ 도 급 비 : 금1,497,661천원

□ 시 공 사  : 우성토건㈜ 외 1개사(건축, 석공사업)

□ 건설사업관리용역사 : ㈜영진엔지니어링 외 1개사

□ 공 정 율 : 80%(수장공사 등 마감공사 중)

Ⅱ		추 진 경 위

□ ‘17.  3. 15. : 근로자복지관 증축 변경 추진계획 수립

□ ‘17.  9. 14. : 설계 및 공사발주 의뢰(노동정책담당관)

□ ‘18.  3. ~ ‘18.  9. : 설계용역 시행

□ ‘18. 10. 01. : 공사 착공

□ ‘18. 10. 12. : 건설사업관리용역 착수

□ ‘19.   5. 23. : 예비준공검사 계획 보고(건설사업관리단 → 건축부)

Ⅲ		예비준공 검사

관련 규정

□ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제104조(준공검사 등의 절차)

□ 예비준공검사 실시 개선대책(행정 2부시장 방침 제27호, 2014.02.06.)

- 계약금액 10억원이상, 외부전문가 합동점검 실시

□ 공공건축물 건립공사 예비준공검사 시행계획(건축부-1247호, 2018.01.26.)

□ 서울시 근로자복지관 증축공사 예비준공검사 계획보고(영진근복 제18-138호, 2019. 5. 23.)

예비준공검사 개요

□ 일시: 2019. 5. 30.(목) 10:00

□ 장소: 서울시 근로자복지관 증축공사 현장

□ 점검자(분야별 합동점검)

- 각 부서 공사관리관 ****************************

- 의뢰부서(노동정책담당관): 담당 팀장, 주무관

********************************

□ 입회자(분야별 합동점검)

- 운영사: 한국노총 서울지역본부

- 건설사업관리용역자: 건설사업관리기술자(상주 및 기술지원 감리원)

- 시공사: 분야별 현장대리인

□ 주요 점검 내용

- 공사 내용 중 미비한 사항의 사전 보완

- 공사 품질확보 및 하자 예방을 위한 사전점검

- 인계·인수 관련 사전 보완사항 점검 등

- 변경 설계도서에 의거 준공검사에 준하여 시행

Ⅳ		행정사항

□ 외부위원 수당지급

******************************

********************************************************************

**********************

Ⅴ		향 후 계 획

□ ‘19. 6.  7.:  지적사항에 보완조치 완료

□ ‘19. 6. 21.:  준공접수 및 준공검사

붙임  1. 서울시근로자복지관 증축공사 예비준공검사 계획보고 1부.

2. 예비준공검사조서(양식) 1부.

3. 지적사항 조치결과 보고서(양식) 1부.

4. 예비준공검사 참석조서(양식) 1부.  끝.