문서번호	공원녹지정책과-10086
결재일자	2019.5.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장	푸른도시국장
임성수	박미성	代김광덕	05/29 최윤종

- 천호공원 시설물 정비공사 -

예산 지원 협조요청에 따른 검토보고

2019. 5.

푸른도시국

공원녹지정책과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

- 천호공원 시설물 정비공사 -

예산 지원 협조 요청에 따른 검토보고

『 천호공원 시설물 정비공사 』사업시행에 따른 부족 예산 지원 협조요청에 대하여 검토하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

※ 추진근거 : 동부공원녹지사업소 시설과-1049호(‘19.5.24.) “공사 시행에 따른 사업비 협조 요청”

- 당초 330백만원 ⇒ 변경 490백만원(증 160백만원 : 금회 지원 협조)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 천호공원 시설물(배드민턴장 등) 정비공사

○ 사업기간 : 2019. 3. ~ 8.

○ 사업내용 : 체육시설 및 편의시설 정비 등

- 배드민턴장 포장정비 1,387㎡ / 산책로 포장정비 2,790㎡

- 편의시설 정비 : 화장실, 배수로 등

○ 사 업 비 : 330,000천원

□ 사업비 요청사유 : 개략공사비 산정 오류 등

○ 산책로 정비물량 산정 오류

- 고무칩 포장  1,300㎡ ⇒ 2,060㎡(증 760㎡)

- 황토경화포장   360㎡ ⇒   730㎡(증 370㎡)

○ 포장 하부 정비비 산정 오류

- 아스팔트 포장  0㎡ ⇒ 3,447㎡(증 3,447㎡)

○ 소요예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	소요예산				부족예산
		계	도급비	관급비	기타(폐기물)
계	333,000	490,000	128,375	314,440	47,185	160,000

□ 추진경위

○ 2019. 02. 08. : 정비계획 수립

○ 2019. 03. 04. : 설계용역 착수

○ 2019. 05. 22. : 설계용역 준공

○ 2019. 05. 23. : 계약심사 완료

□ 검토의견

○ 노후·훼손 시설물 보수 및 산책로 등 기반시설 정비를 위해 필요한 사항이므로 유보금을 활용 사업비 부족예산 지원하고자 함.

□ 행정사항

○ 공원녹지정책과 : 천호공원 시설정비 부족예산 재배정 결정 및 시달

(공원녹지정책과 ⇒ 동부공원녹지사업소)

○ 동부공원녹지사업소(시설과) : 공사발주 및 시행

○ 지원예산 : 160,000천원

- 공사내용 : 산책로, 배드민턴장, 휴게시설, 화장실 등 정비

- 예산과목 : 공원녹지정책과. 공원녹지정책개발 및 만족도 개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 시공원유지관리 및 보수정비, 시설비(205-401-01)

붙임 : 1. 예산재배정 요청공문 및 관련서류 각 1부.

2. 천호공원 시설물(배드민턴장 등) 정비계획 1부.  끝.