문서번호	설비부-8085
결재일자	2019.5.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
백남진		김은덕	전결 05/31 임정규
협조

『G밸리 근로자문화복지센터 전기·통신공사』

준공기한 연기 검토보고(총차 및 1차 2회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5.

도시기반시설본부

(설  비  부)

준공기한 연기 검토보고(총차 및 1차 2회)

「G밸리 근로자문화복지센터전기·통신공사」

「G밸리 근로자문화복지센터 공사」대하여 건설사업관리단으로 부터 공사기간 연기보고서가 제출되어 검토하고 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

□ 실정보고[G밸리근로자문화복지센터 전기공사] : PC G밸리 제*******01호(2019.5.29.)

□ 실정보고[G밸리근로자문화복지센터 통신공사] : PC G밸리 제*******02호(2019.5.29.)

Ⅱ		공사개요

공 사 명	G밸리근로자문화복지센터 전기공사	G밸리근로자문화복지센터 통신공사
공사기간	총 차 : 2018.04.03.~2020.04.01. 1 차 : 2018.04.03.~2019.06.30.	총 차 : 2018.04.03.~2020.04.01. 1 차 : 2018.04.03.~2019.06.30.
도 급 비	총 차 : 932,084,000원 1 차 : 400,000,000원	총차 : 468,159,386원 1 차 : 150,000,000원
시 공 사	㈜아이엔아이외 1	(주)세빛전자통신
감 리 사	㈜펨코엔지니어링	㈜펨코엔지니어링

Ⅲ		검토내용

□ 공사기간 연기사유

선행공종인 건축분야의 공기연장으로 조명설비 및 통신설비 등 후속공정인 전기·통신공사의 공사기간 절대부족

□ 공사기간 연기

○ 공사명 : G밸리근로자문화복지센터 전기공사

(단위 : 원)

구 분	당 초		변 경
	총차	1차	총차	1차
도 급 비	932,084,000	400,000,000	변동없음	변동없음
공사기간	2018.04.03. ~2020.04.01.	2018.04.03. ~2019.06.30.	2018.04.03. ~2020.07.13.	2018.04.03. ~2018.12.31.
연장일수			- 기한연기 : 총차 103일,1차 184일(증) - 총차 및 계약금액 변동없음

○ 공사명 : G밸리근로자문화복지센터 통신공사

(단위 : 원)

구 분	당 초		변 경
	총차	1차	총차	1차
도 급 비	468,159,386	150,000,000	변동없음	변동없음
공사기간	2018.04.03. ~2020.04.01.	2018.04.03. ~2019.06.30.	2018.04.03. ~2020.07.13.	2018.04.03. ~2018.12.31.
연장일수			- 기한연기 : 총차 103일,1차 184일(증) - 총차 및 계약금액 변동없음

□ 선행공정(건축분야) 공사기간 연기로 후속공정인 전기·통신공사의 작업 등이 기한내 작업 할 수 없는 여건으로 공기연장함이 적정 함.

Ⅳ		검토결과

□ 건설사업단의 공사기간 연장 검토보고가 적정하여 현장여건에 맞게 공사기간을 연장하여 공정관리에 만전을 기하고자 함.

붙   임 : 공사기간 연장요청 검토의견서(전기,통신) 각 1부.  끝.