투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰[G밸리 근로자문화복지센터 건립 통신공사]

우리 본부에서 시행 중인「G밸리 근로자 문화 복지센터 건립 통신공사」와 관련하여 아래와 같이 준공기한을 연기코자 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : G밸리 근로자 문화 복지센터 건립 통신공사(총차1회, 1차2회)

나. 계 약 자 : ㈜새빛전자통신 대표 이상호

다. 계약변경 내용

구 분	공 사 기 간		비 고
	당 초	변 경
총 차	2018.04.03. ~ 2020.04.01.	2018.04.03. ~ 2019.07.13.	(증) 103일
1 차	2018.04.03. ~ 2019.06.30.	2018.04.03. ~ 2019.12.31.	(증) 184일
도급비	총차 : 금 468,159,386원 1 차 : 금 150,000,000원	변 경 없 음

라. 예산과목 : 신성장산업과, 신성장산업 육성지원, 산업클러스터 조성 및 활성화, G밸리 근로자 복합공간 조성, 시설비

마. 변경사유 : 선행 공정(건축공사) 변경에 맞춰 통신공사 공기연장

붙임   1. 공사연기 보고서 1부.

2. 동의서 및 공사예정공정표  각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	백남진		건축설비과장	김은덕		설비부장	전결 06/03 임정규
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	설비부-8141	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8626	/전송	02-3708-8659	/		/	부분공개(5)