투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(응봉유수지 CSOs 저류조 설치 소규모 지하안전영향평가용역)

우리부에서 시행 중인 『응봉유수지 CSOs 저류조 설치 소규모 지하안전영향평가용역』 에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 응봉유수지 CSOs 저류조 설치 소규모 지하안전영향평가용역

나. 위    치 : 성동구 고산자로 125-98(응봉유수지 內)

다. 용역규모 : CSOs 저류조 설치 4,000㎥ 등

라. 계 약 자 : ㈜골든엔지니어링

마. 계약변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 / 감	비 고
*****	**********	**********	-	****
****	*********** *************	*********** *************	*****	****

바. 예산과목

- 물순환안전국 물순환정책과, 깨끗한 관리, 물환경개선 및 관리, 응봉유수지 CSOs 저류조 설치

시설비

사. 귀책소재 및 연기사유

- 연기에 따른 귀책소재 : 계약자 귀책사유 없음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 : ******************************************

붙임 :  1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 예정공정표(변경) 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	차성민		환경시설과장	장수철		방재시설부장	06/03 이임섭
협조자	★주무관	최승룡
시행	방재시설부-7925	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	02-3708-8785	/전송		/	csm0528@seoul.go.kr	/	대시민공개