준공기한 연기 의뢰서

1. 계약내용

○ 계 약 명 : 응봉유수지 CSOs 저류조 설치 소규모 지하안전영향평가용역

○ 계 약 자 : ㈜골든엔지니어링

○ 계약금액 : 33,759,000원

○ 계약년월일 : 2019. 03. 20.

○ 착수년월일 : 2019. 03. 20.

○ 준공예정일 : 2019. 06. 17.

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

❍ 준공기한 연기내역 (용역비 : 변경없음)

- 용역기간

· 당초  : '19.03.20.~'19.06.17.

· 변경  : '19.03.20.~'19.08.30. (증 74일)

❍ 귀책소재 : 발주처

❍ 지체상금 : 미 부 과

❍ 연기사유

-「응봉유수지 CSOs 저류조 설치 소규모 지하안전영향평가 용역」서울국토관리청 심의관련 보완 추가설계에 소요되는 기간을 반영하여 준공기한 연장

2019. 5.   .

확인자 : 방재시설부장    이임섭

작성자 : 지방시설주사보  차성민

서울특별시도시기반시설본부 분임재무관 귀하