문서번호	시설과-1208
결재일자	2019.6.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장
이재홍	조민형	06/13 진병규
협 조

율현공원 태양광 발전시설 설치용량 검토보고

2019. 6.

동부공원녹지사업소 시설과

율현공원 태양광 발전시설 설치용량 검토보고

율현공원 태양광 발전시설 설치를 위한 현장확인 결과, 설치장소 협소에 따른 용량변경 사항에 대하여 아래와 같이 검토 보고합니다.

※ 설치용량 변경: 9㎾ ⇒ 8㎾[사유: 옥상경계면과 이격거리(0.3~0.5m) 필요]

Ⅰ		사 업 개 요

사 업 명 : 율현공원 태양광 발전시설 설치공사

사업규모 : 태양광 발전시설 설치 9㎾(화장실 6㎾, 대기실 3㎾)

사업기간 : 2019. 8. ~ 2019. 10.

*********************************************

Ⅱ		보 고 사 항

구분	검토사항	보고의견	비고
설치용량 변경	옥상경계면과 태양광모듈 이격거리 필요. (아래쪽 0.5m, 기타 0.3m) ⇒ 설치용량 변경 : 9㎾→8.01㎾ - 화장실 6㎾→4.68㎾/대기실 3㎾→3.33㎾ ※ 서울시 설치기준 적용	현장여건에 맞게 설치용량을 변경하여 사업추진

화장실(이미지 사진)	대기실(이미지 사진)

Ⅲ		행 정 사 항

사업변경 신청(한국에너지공단).

붙임: 2019년 지역지원사업 사업변경 신청서 및 변경계획서 각 1부.  끝.