“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	중앙차로 정류소 태양광 설치 공사 납품기한 연기 요청

1. 버스정책과-9624(2019.4.8.)호와 관련입니다.

2. 중앙차로정류소 태양광 설치 공사 일정에 따라 분전함 납품기한을 아래와 같이 변경하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건  명 : 중앙차로 정류소 태양광 설치 조달구매(분전함)

나. 구매금액 : 금26,034,000원(금이천육백삼만사백원정)

다. 예산과목 : 버스정책과, 버스운영체계 개선 및 관리, 버스 서비스 향상 및 고급화, 중앙차로 정류소 상부공간 태양광 설치, 시설비 (401-01)

라. 변경내역 : 납품기한 변경

- 변경 전 : 6.21

- 변경 후 : 7.31

마. 변경사유 : 분전함, 태양광(BIPV) 조달구매 납품기한이 달라 공사 진행에 어려움이 있어 준공날짜 통일

붙임 1. 중앙차로 태양광 설치 추진계획 1부

2. 합의각서 1부.  끝.

	버스정책과장
주무관	전희선		정류소관리팀장	이상학		버스정책과장	06/17 오희선
협조자
시행	버스정책과-18313	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문청사 1동 7층 버스정책과	/
전화	02-2133-2294	/전송	02-2133-1049	/	jeon1891@seoul.go.kr	/	부분공개(5)