문서번호	도시철도사업부-5868
결재일자	2019.6.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		신교통과장	도시철도사업부장
왕태현		성원배	06/17 최병훈
협 조
	주무관			김동일
	주무관			이병석

- 별내선(8호선연장) 2공구 건설공사(2차) - 예비준공검사 시행계획

2019.06.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

- 별내선(8호선연장) 2공구 건설공사(2차) - 예비준공검사 시행계획

별내선(8호선연장) 2공구 건설공사(2차)와 관련, 예비준공검사를 실시하여  준공검사 및 공사추진에 만전을 기하고자 함.

※ 관련근거 : 별내선 2공구 2차공사 예비준공검사 수행계획 보고

(철도1부(현장)-2019-04248, ‘19.6.14)

공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 ～ 구리시 토평동

○ 규     모 : 연장 2,536㎞ (환기구 2개소, 본선터널 NATM·쉴드TBM)

○ 공사기간 : ´17.9.30. ~ ´23.9.28.(2차 : ′18.7.28. ~′19.6.27)

○ 시공사/건설사업관리단 : ㈜두산건설 / ㈜도화엔지니어링 외2개사

○ 도 급 비 : 1,380억원 (2차 : 15,000백만원)

관련근거

○ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제104조(준공검사 등의 절차)

○ 예비준공검사 시행방법 개선(기술심사담당관-10083호, 2018.6.28.)

- 대상공사 : 감독권한대행 등 건설사업관리 시행공사, 안전관리계획 수립 공사

- 주 체 자 : 발주청

- 검 사 자 : 발주청 소속직원 2인 이상  ※ 필요시 기술지원기술자 입회

예비준공검사

○ 일    시 : 2019. 6. 18(화) 14:00 ~

************************************************

***************************************

○ 장    소 : 별내선 2공구 건설공사 현장

○ 검 사 자 : **************************

○ 입 회 자 : **************************

○ 검사방법 및 내용
- 건설사업관리기술자가 확인한 정산 설계도서 등에 따라 검사 실시

- 검사 내용은 준공검사에 준하여 실시

향후계획

○ ‘19. 6. 21. : 지적사항 보완조치 완료
○ ’19. 6. 24. : 2차공사 준공

붙 임 : 1. 예비준공검사조서(양식) 1부.

2. 지적사항 조치결과 보고서(양식) 1부.

3. 예비준공검사 참석조서(양식) 1부.  끝.