문서번호	교통운영과-10443
결재일자	2019.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통개선팀장	교통운영과장
박평근		이유국	06/18 강진동
협조

「2019년 도로점용공사장」교통소통대책 자문회의 결과 보고(제9차)

2019. 6.

교통운영과

「2019년  도로점용공사장」

교통소통대책 자문회의 결과 보고(제9차)

제9차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 ’19.6.13.(목)에 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 자문회의 개요

○ 개최일자 : 2019. 6. 13.(목) 15:00 ~ 18:00

○ 장    소 : 서울시청 서소문별관 1동 7층 회의실

○ 참석위원 : 8명 (당연직 : 1명, 위촉직 : 7명)

- 당연직 : 교통운영과장

- 위촉직 : 송두석 위원, 신건철 위원, 이동원 위원, 정필현 위원, 이경아 위원, 홍지연 위원, 김봉찬 위원

- 간  사 : 교통개선팀장

○ 자문대상 및 결과 : 총 8건

- 결  과 : 조건부 시행 8건

□ 자문회의 결과

○ 공통사항

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

1) 고덕3단지아파트 주택재건축정비사업 정비기반시설공사(재심의)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
고덕로, 상일로	‘19.06.25. ∼‘20.02.29	24시간	1개 차로	고덕3단지아파트 주택재건축정비사업조합

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 총괄도에 전체 단계를 표시하기 바람

- 교대 통행이 가능한 도로는 단면도를 수정하기 바람

- 1단계 공사시 굴착은 관배설 방향으로 굴착하고 그에 대한 점용구간을 조정하여 공사를 시행하기 바람

- 2, 3단계 공사시 보도를 활용하기 바라며, 단계를 세분화하여 공사를 시행하기 바람

- 1-3단계 고덕역에서 상일IC 우회전 차로 확보를 검토하기 바람

- 3-3단계 상일동역 방면 도류화 제거를 검토하기 바람

2) 밤고개로 확장공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
밤고개로	2019.06.30. ∼12.20.	24시간	1~2개 차로	도시기반시설본부

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 신설보도 구간은 도면에 표시하기 바람

- 1~2단계공사와 중앙분리대 공사가 중복이 발생하지 않도록 공사를 시행하기 바람

- 밤고개로 공사중 교통소통대책 변경 사유와 타당성을 제시하기 바람

- 도로축소시 사전에 홍보하여 이용자의 불편을 최소화하기 바람

- 출퇴근 시간대에는 공사를 자제하여 교통정체를 최소화화기 바람

3) 홍제천고가교 교면표장 정비공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
내부순환로	2019.06.24. ∼12.31.	야간 (22~06)	1~2개 차로	서울시설공단 도로관리처

○ 자문결과 : 조건부 시행

- VMS 통한 홍보 전략(공사일시, 시간, 공사차로 등)을 자세하게 수립하여 공사를 시행하기 바라며, 최소 10일전부터 홍보를 시행하기 바람

- VMS 홍보시 성수대교, 영동대로 등 내부순환로를 진입하기 전에 홍보하여 차량운전자의 노선 선택이 가능하도록 원거리부터 홍보하기 바람

- 홍보시 공사 구간은 차량운전자가 쉽게 알수 있도록 내부순환로에 정보를 제공하기 바람

- 공사 시행은 23시부터 시행, 06시 전에 마무리 할 수 있도록 하기 바람

4) 2019년 서호교 교면포장공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
강변북로	46일	야간 (22~06)	1~2개 차로	서울시설공단 도로관리처

○ 자문결과 : 조건부 시행

- VMS 통한 홍보 전략(공사일시, 시간, 공사차로 등)을 자세하게 수립하여 공사를 시행하기 바라며, 최소 10일전부터 홍보를 시행하기 바람

- 홍보시 공사 구간은 차량운전자가 쉽게 알 수 있도록 강변북로에 정보를 제공하기 바람

- 13, 14단계 램프 차단 공사시 사전에 홍보를 강화하기 바람

5) 2019년 정릉·흥지문터널 보수공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
내부순환로	2019.07.01. ∼11.30.	야간 (23~06)	1~2개 차로	서울시설공단 도로관리처

○ 자문결과 : 조건부 시행

- VMS 통한 홍보 전략(공사일시, 시간, 공사차로 등)을 자세하게 수립하여 공사를 시행하기 바라며, 최소 10일전부터 홍보를 시행하기 바람

- 터널 구간 공사시 속도를 제한하여 공사를 시행하기 바람

6) 강남구 언주로 역삼자이아파트 일대 열수송관공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
언주로	2019.07.01.∼07.30.	야간 (22~06)	1~2개 차로	한국지역난방공사 강남지사

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 1단계 공사후 복공을 설치하기 바람

- 2, 4, 6, 7단계 공사시 관방향으로 굴착하기 바라며 그에 따른 점용구간을 조정하여 공사를 시행하기 바람

7) 구기터널 환경개선공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
진흥로	2019.06.11. ∼10.08.	야간 (22~06)	1개 차로	북부도로사업소 시설보수과

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 공사시 터널 구간에 대해 속도를 제한하기 바람

- 2단계 공사시 시점부 차단시설을 보완하기 바람

8) 북악터널 제연설비 설치공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
정릉로	2019.09.16. ∼12.13.	야간 (22~06)	1~2개 차로	북부도로사업소 기전과

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 내부순환로 홍지문 터널 공사와 기간이 중복되지 않도록 하기 바람

- 터널 1개 구간을 완전 폐쇄하여 공사를 시행하는 방안도 검토하기 바람

붙임  1. 자문위원 참석 명단 1부.

2. 공사업체 참석 명단 1부.  끝.