문서번호	토목부-10826
결재일자	2019.6.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박상철		명경출	06/19 김영수
협조

교통섬철거 및 상수도공사 변경 검토 보고

(노들섬 특화공간조성 토목공사)

2019. 6.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

교통섬철거 및 상수도공사 변경 검토 보고

(노들섬 특화공간조성 토목공사)

본 공사 시행중 양녕로 교통섬철거 및 상수도 인입공사 대하여 검토 보고 하는 사항임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사

○ 위    치 : 용산구 이촌동 302-146일대(노들섬)

○ 규    모 : 보행육교설치 폭3.5m, 길이 139m, 옹벽보수 10,137㎡

○ 공사기간 : 2017. 9. ～ 2019. 9.

○ 사 업 비 : 7,900백만원

○ 도 급 자 : 신성종합건설(주) / ○ 감 리 자 : ㈜유탑엔지니어링

□ 현 황

❍ 양녕로 교통섬에 보행육교 기둥설치에 따른 철거 및 재설치

❍ 상수도 인입공사의 선로 변경에 따른 수량 증가

(교통섬 현황)                    (상수도 관로 위치 현황)

□ 검토내용

❍ 양녕로 교통섬에 보행육교 기둥을 설치하여 교통섬 관리부서와 협의 결과 교통섬에 있는 화단을 제거하고 기둥을 설치한 뒤 원상 복구 요청한 상태임.

❍ 상수도 인입공사를 중부수도 사업소에서 시행하였으나 양녕로에 설치된 급수관 위치가 달라 변경된 급수관에 따라 부지내 상수도관로 추가 공사가 필요한 상태임.

○ 공사비 검토

구 분	당 초	변 경	증감
1. 직접공사비 계	4,693,982,413	4,712,367,384	18,384,971
2. 제경비계	911,446,556	914,270,856	2,824,300
순공사원가	5,605,428,969	5,626,638,240	21,209,271
3. 일반관리비	297,087,733	298,211,826	1,124,093
4. 이 윤	456,416,304	457,918,394	1,502,090
5. 기타	136,811,540	136,811,540	0
공급가액	6,495,744,546	6,519,580,000	23,835,454
6. 부가가치세	649,574,454	651,958,000	2,383,546
총 공사금액	7,145,319,000	7,171,538,000	26,219,000

□ 감리단 검토 내용

❍	한강대교 교통섬 철거 및 설치는 보행육교 기초 공사를 위하여 도로점용 및 굴착허가 등에 따라 시행하여야 하며

❍	상수도 제수변 위치는 설계당시와 상이하여 실정보고로 반영함이 타당하다고 사료됨

□ 조치의견

❍	상기 감리단 검토의견과 같이 승인코자 하며, 추후 공사 설계변경시 정산처리함이 타당하다고 사료됨.

❍ 신규 공종의 단가적용은 현장대리인, 책임건설사업기술자, 공사관리관이 협의하였으나 적정 협의율이 협의가 안됨에 따라 공사계약일반조건제20조2항에따라 조치코자 함.

- 신규단가 : (100%+85.83%) / 2 = 92.91%적용

- 개략공사비 : 증) 26백만원

붙 임 : 감리단검토의견서 1부.  끝.