투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	변경 계약의뢰(시민생활사박물관리모델링 증축 기계공사(총차 및 2차)

1. 설비부-9074호(2019.6.19.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리 부에서 시행 중인『시민생활사박물관리모델링 증축 기계공사』에 대하여 설계변경 및 준공(정산)이 발생하여 아래와 같이 변경 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건      명 : 시민생활사박물관리모델링 증축 기계공사

나. 계약상대자 : ㈜포스코오앤엠

다. 변경 계약 현황

구 분		변경전	변경후	증□감
공사기간		‘17.12.08~’19.06.20	‘17.12.08~’19.06.20	변경없음
공사금액	총차	1,765,559,880	1,837,729,690	증 72,169,810
	2차	717,671,000	789,840,810	증 72,169,810

따로붙임 : 검토보고서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	이강욱		건축설비과장	김은덕		설비부장	06/19 임정규
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	설비부-9124	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시중구 청계천로8(무교동96번지)프리미어플레이스 빌딩 15층 108-1	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8627	/전송	02-3708-8659	/	24326@seoul.go.kr	/	부분공개(5)