투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	시정 요구에 대한 회신

정○○님 안녕하십니까?

먼저 바쁘신 가운데도 불구하고 시정업무에 많은 관심을 가지시고 의견을 보내주신데 대하여 깊은 감사를 드립니다.

정○○님께서는 우리 본부에서 시행 중인 “남부순환로(개봉1동사거리 주변) 평탄화공사” 와 관련하여 당초 공사는 3년 정도 공기로 진행을 하였는데 민원 및 설계변경 등으로 공사 기간이 2년가량 연장되었으며, 사업 시행 전에 사업성에 대하여 충분히 검토가 이루어지지 않아 시민이 피해를 보고 있는 사항에 대하여 시정을 요구하셨습니다.

먼저 동 공사로 인하여 통행에 불편을 드림 점 사과드립니다. 동 사업은 남부순환로 본선으로 인한 지역간 단절 해소 및 교통 개선을 위한 평탄화 사업으로써,

본 사업은 서울시 도로계획과에서 ‘09. 3.30. ~ ’11.10.31 타탕성 용역 및 기본설계 용역 시행, ‘13. 2.15 실시설계 준공, ’16.3 공사 착수 하였으나, 일부 지역주민의 평탄화공사를 지하차도 설치로 변경 요구, 평탄화 구간 추가 요구 등 각종 민원 등으로 공사추진이 원활치 못하였으며, 이로 인하여 남부순환로를 이용하는 시민에게 불편을 드린점 대단히 송구 합니다.

우리 본부에서는 서울시의 각종 기반시설을 건설하는 핵심부서로서 공정체크를 더 확실히 할 수 있도록 공정회의를 2주에 1회로 앞당겨 공사관계자들을 독려하고, 안전을 최우선으로 하여 정밀한 시공을 바탕에 두고 최대한 노력을 경주하여 빠른시일내 공사를 마무리 하는데 최선을 다하겠습니다. 다시한번 공사로 인하여불편을 드린점 사과드리며, 무더운 날씨에 건강 유의 하시고, 귀댁에 항상 웃음과 행복이 함께하기를 기원합니다. 감사합니다.  끝.

주무관							이한규			광역도로과장					06/24 박일연
협조자
시행			토목부-11208									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층 도시기반시설본부 토목부															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2556						/전송			02-3708-2599					/	lhg2023@seoul.go.kr												/	부분공개(6)