문서번호	토목부-11287
결재일자	2019.6.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		명경출	06/25 김영수
협조
	주무관		박운용

-강남순환도시고속도로(8공구)-

사토장 추가선정 검토 보고

2019. 6.

도시기반시설본부

토 목 부

-강남순환도시고속도로(8공구)-

사토장 추가선정 검토 보고

강남순환 8공구 건설공사의 원활한 토사 반출을 위해 추가 사토장 선정을 검토 보고 드림

공사개요

□ 위    치: 선암U/D ~ 강남 수서IC

□ 규    모: 폭 4~10차로, 연장 7.96km(교량2개소, 지하차도 4개소)

□ 도 급 비: 3,188억 원

□ 사업기간: ’02. 7. 3. ~ ’22. 12. 31.

□ 시공사/감리사: 롯데건설㈜ 외 1 / ㈜동명기술공단

사토장 선정 추진경위

□ ’19. 6. 11.	: 기존 사토장(이천시 부발읍 신원리) 반입불가 통보

□ ’19. 6. 17.~18.	: 토석정보공유시스템 인근 현장 사토장 조사

사토장 선정 현황

□ 사토장 현황

구 분	설 계 (수도권 매립지)	기 선정	금 회 선정
위 치	인천시 서구 백석동	화성시 비봉면 양노리 산152-1	이천시 진리동 303-4
운반거리 (km)	46.61	41.23	51.71
왕복시간 (분)	131.59	113.12	151.85
인･허가 (신고)	신고필	신고필	신고필
단가 (원/㎥)	12,005	12,036	12,036

구 분	금 회 선정	금 회 선정	금 회 선정
위 치	이천시 안흥동 242-1	여주시 흥천면 효지리 176	여주시 흥천면 외사리 544-2
운반거리 (km)	50.47	58.42	51.60
왕복시간 (분)	145.45	164.06	142.91
인･허가 (신고)	신고필	신고필	신고필
단가 (원/㎥)	12,036	12,036	12,036

□ 적용단가 검토

- 금회 선정한 사토장 운반단가는 기 선정된 사토장(화성시 비봉면) 운반단가 12,036원/㎥ 적용

□ 수량 및 공사비 증·감 현황

구 분	수 량			단위	금 액(천원)
	당 초	변 경	증·감		당 초	변 경	증․감
토공(사토)	17,000	17,000	-	㎥	204,085	204,612
직접공사비					204,085	204,612	527
제 경 비					87,915	53,388	-34,527
도 급 공 사 비					292,000	258,000	-34,000

검토의견

❍ 원활한 토사 반출을 위해 신규 사토장 선정을 검토한 책임건설사업관리기술자의 실정보고가 타당하므로 승인하고자 하며, 추후 설계변경에 정산 반영하고자 함.

붙임  건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.