				★ ◎
문서번호	기계사업부-1992			부 원			기계사업부장			에너지기술사업처장 직무대행
보존기간	30년										06/26
				윤종호			박상현			허원
결재일자	2019.06.26
공개여부	부분공개(7)			협조
일상감사	대상아님
보조제목을 입력하는곳 입니다
신내동 640 행복주택 건설공사 설계변경 보고(기계)
		서울주택도시공사
(기계사업부)

신내동 640 행복주택 건설공사 설계변경 보고

우리공사에서 시행중인 “신내동 640 행복주택 건설공사”와 관련하여 서울시 상수도사업본부 요청 등 시공보완사항을 아래와 같이 설계변경 시행코자 함

관련근거

❍ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약금액조정)

❍ 유탑신내(대외) 제19-96(2019. 6. 25.)호

공사개요

구 분	도 급 사	공사기간	도급금액 (기계 , 원)	비 고
신내동 640 행복주택 건설공사	㈜옥토, 명남종합건설(주), ㈜남일기업	2016. 7. 1.~ 2019. 7. 9.	4,250,710,000	건설사업관리용역사: ㈜유탑엔지니어링 건축사사무소

설계변경 현황

❍ 설계변경 현황

(단위: 천원)

구 분	변경전	변경후	증감	변경사유	비 고
도 급 비	4,250,710	4,258,402	증)7,692	직결급수방식 및 시운전비 관리기간 반영 등	입주개시 예정일: 2019. 11. 4.
지급자재비	122,675	122,675	0	-
계	4,373,385	4,381,077	증)7,692	-

❍ 목표원가 현황

(단위 : 백만원)

구 분	공사비					목표공사비대비 (ⓑ/ⓐ)	비 고
	상한	목 표ⓐ	변경전	변경후ⓑ	증감
기 계	4,033	3,831	4,225	4,233	증) 8	110 %	도급비 + 지급자재비
전 체	28,766	27,328	21,120	21,120		78 %

※ 예산자금부-5899(2018. 12. 18, 2018년 하반기 공동주택 건축비 목표원가 관리계획 통보)호

설계변경 내용

❍ 세부변경내용

(단위 : 천원)

구 분	변경전	변경후	증 감	관련근거	비 고
기계설비공사	2,905,918	2,913,610	증)7,692	지시부 기계-9호 (2019. 6. 19.)
소방설비공사	1,197,046	1,197,046	0	-
1차 물가연동액	147,746	147,746	0	기계약 완료	미정산
2차 물가연동액	-	120,707	증)120,707	건축공사부-2934호 (2019. 6. 10.)	미정산
계	4,250,710	4,379,109	-	-

행정사항

❍ 상기와 같이 설계변경 현황을 주공종인 건축공사부에 통보하여 계약변경시 반영조치

붙임  설계변경 내역서(신내동 640).  끝.