문서번호	물재생시설과-8710
결재일자	2019.6.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
김종희		황철호	06/27 임춘근
협조
	실무사무관		안봉용

「서남물재생센터 슬러지 건조시설(2단계) 설치 기본 및 실시설계 용역」

설계변경(과업기간 연장) 검토 보고

2019. 6.

물재생시설과

(물재생기전팀)

「서남물재생센터 슬러지 건조시설(2단계) 설치 기본 및 실시설계 용역」

설계변경(과업기간 연장) 검토 보고

슬러지 건조시설 기본 및 실시설계 용역과 관련하여 설계 경제성(VE) 심사, 건설기술심의 등 절차이행을 위한 절대공기 부족으로 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 보고드림.

□ 용역 개요

❍ 용 역 명 : 서남물재생센터 슬러지건조시설(2단계) 설치 기본 및

실시설계 용역

❍ 용역기간 :  2018. 10. 22 ~ 2019. 7. 18(270일)

******************************

***************************

	<2단계 건조시설 설치사업>
- 시설규모 : 슬러지건조시설 270톤/일(최대 300톤/일) 설치 - 처리대상 : 제2처리장, 현대화시설 및 총인시설 발생슬러지 탈수케익 ※ 1단계 처리대상 : 서남센터에서 발생되는 하수슬러지 탈수케익 - 처리방식 : 슬러지 건조처리(함수율 : 60~85% → 10%이내) - 공사범위 : 2처리장 탈수기동 유휴공간에 건조시설을 설치하는 사업

□ 추진 경위

❍ ’15.09 : 하수슬러지 처리 자립화 대책

- 4개센터에 하수슬러지 자체처리시설 1,170톤 설치

※ 서남2단계(270톤/일)는 민자사업으로 추진

❍ ’16.06 : 서남 건조시설(2단계) 설치방안 보고 : 민자 → 재정 전환

❍ ‘18.10 : 설계용역 계약

❍ ‘18.12 : 설계용역 착수보고회 개최

❍ ‘19.06 : 건조공법 선정 ⇒ 간접패들 건조방식, 코오롱환경서비스(주)

□ 설계변경 검토

❍ 설계변경 내용

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
용 역 비	697,550천원	697,550천원	변동 없음
용역기간	‘18.10.22 ~ ’19.07.18	‘18.10.22 ~ ’19.10.31	연장기간 105일

❍ 설계변경 사유

- 슬러지 건조시설 설치와 배치를 기존 건물을 활용하는 것보다는 신규 건물을 증축하는 방향으로 변경함에 따라 지반조사, 측량조사를 추가로 추진하였고,

- 대규모 총인슬러지(129톤/일) 처리방안 마련이 필요함에 따라 이를 위한 검토 및 협의 등 추진에 시일이 소요됨에 따라 다소 용역추진이 지연되었으며,

- 향후 실시설계, 설계경제성(VE) 검토, 기술심사 및 주민협의회 사업설명 등 절차를 이행하기 위해서는 절대공기가 부족하므로 준공기한 연기가 필요함.

	<기타 참고사항>
- 근로기준법 변경 시행에 따른 근로시간 단축 ․68시간/주(‘18.07.01이전) → 52시간/주(‘18.07.01이후) - 기존 용역(중랑, 난지, 탄천, 서남1단계) 대비한 용역기간 절대 부족 ․기존 : 약 11개월[착수 - ‘16.06 ~ ’16.07, 준공 - ‘17.05 ～ ’17.06]

❍ 지체상금 : 미부과

□ 조치 계획

❍ 과업수행에 차질이 없고, 내실있고 효율적인 용역 수행을 위해 위와 같이 설계변경하여 용역기간 연장하고자 함.

붙임 : 과업기간 연장요청 문서 1부.  끝.