문서번호	토목부-11596
결재일자	2019.6.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도시고속도로과장	토목부장
서민석		명경출	06/28 김영수
협조
	주무관		백종임

공사 중 안전시설 변경설치 검토보고

[구로고가 철거공사]

2019. 6.

도시기반시설본부

토 목 부

공사 중 안전시설 변경설치 검토보고

[구로고가 철거공사]

「구로고가 철거공사」와 관련하여 변경된 단계별 교통소통대책에 따라 공사 중 안전시설을 설치하고, 이를 반영코자 검토보고 드림.

1		관련근거

❍ 광안건(구) 2018-13호 착수전 현안사항 검토보고(0단계 추가)

❍ 광안건(구) 2018-26호 보도확장공사 실정보고(7단계 추가)

❍ 광안건(구) 2019-83호 실정보고(PE방호벽 변경 반영) 승인요청

2		공사개요

❍ 위    치 : 구로구 가리봉동 140(남부순환로, 디지털단지5거리 주변)

❍ 규    모 : 고가차도 철거(폭 18.5m, 연장 536m)

❍ 공사기간 : '18.8. ~ '19.7.

❍ 도 급 비 : 7,783백만원

❍ 시 공 사 : 새천년종합건설 주식회사 외 2개사

❍ 감 리 사 : 동부엔지니어링㈜ 외 2개사

3		건설사업관리단 보고내용

□ PE방호벽 수량정산

❍ 단계별 소통대책에 따른 PE방호벽 설치 현황

구 분	수량			비고
	당초(EA)	변 경(EA)	증·감(EA)
0단계(추가)	-	1,130 (구입 및 설치)	1,130
0-1단계(추가)	-	548 (유용)	548
1단계	1,005	1,005 (유용)	-
2단계	805	805 (유용)	-
3단계	910	910 (유용)	-
4단계	1,012	1,012 (유용)	-
5단계	974	974 (유용)	-
6단계 (보도확장공사)	-	429 (구입 및 설치)	429
7단계	29	29	-	시행예정
합 계	4,735	6,842	2,107	구입수량(3개월손료) : 1,559 EA

□ H빔 가림막휀스 설치수량 변경

❍ 고가 상단 기존난간 저촉에 따른 가림막 휀스 설치불가 (교통소통 1단계 중 설치)

- H빔 가림막 휀스 구입, 설치 및 철거 수량 변경 : 465M → 0M

□ 수량 증·감 현황

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·감
3.포장공
3.09 공사중 안전시설
c. PE방호벽
c-1. PE방호벽 구입		ea	202	202
c-2. PE방호벽 설치 및 철거		ea	746	746
5.부대공
5.02 공사중 안전시설
d. PE방호벽
d-1. PE방호벽 구입	3개월	ea	810	1357	547
d-2. PE방호벽 설치 및 철거	3개월	ea	2984	6096	3112
g. H빔가림막휀스
g-1. H빔가림막휀스 구입	H빔+가림막휀스(H=1.2xW=2.0),3개월	m	465		-465
g-2. H빔가림막휀스 설치 및 철거	H빔+가림막휀스(H=1.2xW=2.0),3개월	m	465		-465

□ 공사비 증·감 현황

(단위: 천원)

공 종	당 초	변 경	증△감	비고
3.포장공 및 5.부대공
5.02 공사중 안전시설
직 접 공 사 비	64,835	102,512	37,677
간 접 공 사 비	20,265	25,688	5,423
공 급 가 액	85,100	128,200	43,100
부 가 가 치 세	8,510	12,820	4,310
도 급 액	93,610	141,220	47,410

※ 적용단가 : 기계약 단가 적용

4		검토결과

❍ 「구로고가 철거공사」중 변경된 단계별 교통소통대책에 따라 “공사중 안전시설”을 설치하여 적절한 차선 및 방호벽 확보로 차량의 흐름을 원활히 하고자 하는 건설사업관리단의 의견은 타당하다고 판단됨.

5		조치계획

❍	위 건에 대하여 실정보고 승인 통보하고 추후 설계변경에 반영코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 실정보고 검토의견서 1부.  끝.