투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	설계변경 시행 및 계약의뢰(디지털3단지, 2차 4회)

1. 방재시설부-10034호(2019.07.08)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 장기계속사업으로 시행중인 『디지털3단지~두산길간 지하차도 건설 공사』에 대하여 아래와 같이 2차 4회 설계변경 시행하고, 변경계약 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 디지털3단지~두산길간 지하차도 건설공사(장기계속)

나. 도 급 비 : 총차 11,481,000,000원 (2차 4,033,300,000원)

다. 공사기간 :  총차 ‘17.12.26 ∼ ’21.04.08(2차 ‘18.03.22 ~ ’19.12.31)

라. 도 급 자 : 대명지이씨(주) 외 3개사

마. 설계변경(2차 4회)

1) 공사기간 : 변경없음

2) 설계변경 현황

1) 총 차

구 분	당 초	변 경	증⦁감(-)	비 고
총공사비	15,157,000,000원	15,157,000,000원	-	변경없음
도 급 액	12,588,000,000원	12,588,000,000원	-
관급자재비	2,569,000,000원	2,569,000,000원	-

2) 2차 공사(변경 4회)

구 분	당 초	변 경	증⦁감(-)	비 고
총공사비	4,539,800,000원	4,224,800,000원	감 315,000,000원
도 급 액	4,033,300,000원	3,718,300,000원	감 315,000,000원
관급자재비	506,500,000원	506,500,000원	0원

3) 변경사유 : 교학사 보상지연으로 2019년 예산집행 계획변경에 따른 설계변경

바. 예산과목 : 안전총괄본부 도로계획과, 도로건설, 도시개발특별회계, 간선도로망 확충, 디지털3단지~두산길간 지하차도 건설공사, 시설비및부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 건설사업관리 용역사 검토의견서 1부.

3. 설계변경(2차 4회) 내역서 1부.    끝.

	방재시설부장
주무관	최승룡		환경시설과장	장수철		방재시설부장	07/08 이임섭
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	방재시설부-10049	(		)	접수		(		)
우	04809	중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 14층	/
전화	02-3708-8783	/전송	02-3708-8756	/	csy21@seoul.go.kr	/	대시민공개