문서번호	방재시설부-10220
결재일자	2019.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		환경시설과장	방재시설부장
조양호		오열상	07/10 이임섭
협조

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

건설폐기물처리용역(혼합폐기물) 준공기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 7.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

건설폐기물처리용역(혼합폐기물) 준공기한 연기 검토보고

『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업』건설폐기물처리용역(혼합폐기물) 관련 준공기한 연기(1차 1회)에 대한 검토 보고임.

※ 관련근거 : 중랑감 제19-245호(2019. 7. 10)

용역개요

❍ 용역기간 : 총괄  2018. 08. 13 ∼ 2020. 01. 12

1차  2018. 08. 13 ~ 2019. 06. 30

❍ 용역금액 : 총괄 1,884,666,000원, 1차 1,200,000,000원

❍ 도 급 자 : (주)수도권환경 대표이사 차석구

주요내용

❍ 계약금액 및 기간 변경내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감
용역 금액	총괄	1,884,666,000	1,884,666,000	-
	1차	1,200,000,000	1,200,000,000	-
용역 기간	총괄	2018. 08. 13 ∼ 2020. 01. 12	2018. 08. 13 ∼ 2020. 01. 12	-
	1차	2018. 08. 13 ∼ 2019. 06. 30	2018. 08. 13 ∼ 2019. 10. 15	증 107일

- 사유 : 혼합폐기물 발생 미도래에 따른 건설폐기물처리용역(혼합폐기물) 준공기한 연기 필요

검토의견

<책임건설사업관리기술자>

❍ 폐기물 발생 미도래에 따른 건설폐기물처리용역(혼합폐기물) 준공기한의 연기가 필요한 것으로 판단됨.

조치의견

❍ 상기 책임건설사업관리기술자 보고내용을 검토한 바 적정한 것으로 판단되므로 건설폐기물처리용역(혼합폐기물) 준공기한을 연기토록 통보하고자 함.

- 준공기한 연기 요청 지연에 따른 건설사업관리단 및 폐기물처리업체 엄중 경고하여 추후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 책임건설사업관리기술자 검토의견서 공문 1부.  끝.