문서번호	설비부-11005
결재일자	2019.7.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박갑임		이종근	07/18 임정규
협조

서울바이오허브 조성공사(2단계) 기계설비공사

관급자재 납품기한 연장 검토보고

2019. 07.

도시기반시설본부

( 설  비  부 )

서울바이오허브 조성공사(2단계) 기계설비공사

관급자재 납품기한 연장 검토보고

『서울바이오허브조성공사(2단계)』와 관련, 건설사업관리단으로부터 제출된 관급자재 납품기한 연기요청에 대하여 검토 후 아래와 같이 보고드림.

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울바이오허브 조성(2단계) 기계·전기·통신공사

❍ 공사규모

- 신관동(대수선) : 지하1층/지상5층, 연면적 3,216㎡, 교육연구시설

- 별관동(증  축) : 지하2층/지상4층, 연면적 3,112㎡,     ″

❍ 공사기간 : 2017. 9. 29. ~ 2019. 10. 18.(총차)

2018. 3. 26. ~ 2019. 10. 18.(2차)

❍ 공사금액 : 1,180백만 원(2차 1,011)

❍ 시 공 사 : ㈜우현이앤지

❍ 건설사업관리단 : ㈜한국종합건축사사무소

2		감리단보고내용

❍ 검토근거 : 서울바이오허브조성공사(2단계) 기계설비공사 관급자재 납품기한 연장요청(한종홍릉 제2019-1517호, 2019.7.17.)

❍ 보고내용

- 별관동 공간구획 변경 및 인테리어 추가공사에 따른 건축 등의 주 공정 공사기간이 연장됨에 따라 후속공정인 관급자재 납품기한 연장

3		공사기간연장내용

❍ 계약기간 조정

물 품 명	계약번호	계약금액(원)		납품기한		비고
		변경 전	변경 후	변경 전	변경 후
냉난방기	00168160112	30,450,700	변경없음	2019. 8. 13	2019. 10. 18
	00178156502	62,138,460	″	″	″
	00168160118	10,161,000	″	2019. 7. 19	″
	00168160118	12,147,200	″	2019. 8. 13	″
공기순환기	00168163503	80,807,510	″	2019. 8. 14	″
	00188157300	57,913,940	″	″	″
	00188157301	8,405,600	″	″	″
지열시스템	12182129300	202,500,000	″	″	″
엘리베이터	12182036900	246,520,000	″	″	″
자동제어	12182162901	268,493,720	″	″	″
공기조화기	00177050902	47,605,000	″	″	″
전기난방패널	00167048302	9,971,000	″	″	″
	00167048304	665,000	″	″	″
TAB용역	20182217016	13,979,250	″	2019. 8. 30	2019. 10. 31

❍ 공사기간 연장 귀책 기관 : 도시기반시설본부

❍ 지체상금 부과 여부 : 미부과

4		조치의견

❍ 건설사업관리단의 검토보고 내용이 적정하다고 판단되므로, 현장 여건에  맞게 공사기간을 연장하여 공정 관리에 차질이 없도록 조치하고자 함.

따로붙임 : 감리단 검토 보고서 1부.  끝.