문서번호	방재시설부-10569
결재일자	2019.7.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설과장	방재시설부장
김달용		신용우	07/18 이임섭
협 조

『노들섬 특화공간 조성공사』

하단부 안전시설 설치 실정보고 검토보고

2019. 7.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『노들섬 특화공간 조성공사』

하단부 안전시설 설치 실정보고 검토보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

『노들섬 특화공간 조성공사』책임건설사업관리기술자로 부터 하단부

옹벽녹화 추진에 따른 안전시설 설치 실정보고 사항이 있어 검토하여

보고 드림. [관련공문 : 유탑노들 제19-337호(2019.07.12)]

Ⅰ		공사개요

○ 위    치 : 용산구 이촌동 302-6 일대 (노들섬)

○ 규    모 : 연면적 9,854㎡ (지상3층 4개동 : 업무시설, 문화 및 공연시설)

□조경공사 : 수목식재(교목299주, 관목9,634주), 조경시설 31종 등

○ 기    간 : 2017.10.26 ~ 2019.10.20

○ 도 급 비 : 159억원 (조경 26억원)

Ⅱ		실정보고 내용

○ 보고내용

- 노들섬 하단부 옹벽녹화 추진에 따른 안전시설 설치

▪설치목적

□노들섬 하단부 옹벽녹화 공정이 기존 콘크리트 철거 및 불량토사

치환작업과 대형수목 운반 등으로 중대형 장비(굴삭기,덤프트럭)에 의한

현장관리와

□하단부에 차량을 이용한 낚시꾼들의 출입이 빈번하여 안전사고 예방

대책이 필요함

▪시행방법

□안전시설 설치 및 신호수 배치

☞ 하단부 출입통제용 출입문 설치

☞ 교통안전표시판 및 안전휀스 (야간발광)

☞ 중장비 신호수 및 관리인부 투입

○ 도급비 승인요청                                  (단위 : 천원)

구 분	단위	당 초		변 경		증․감
		수 량	금 액	수 량	금 액
계					18,607	증)18,607
하단부 출입문	개소	-	-	1	1,320	증)1,320
안전시설물	식	-	-	1	6,627	증)6,627
신호수, 관리인부	인	-	-	82	10,660	증)10,660

Ⅲ		검토보고

○ 출입문 및 안전시설 설치

- 노들섬 하단부는 낚시꾼들에 의한 차량과 텐트 등이 난립하고 있어 공사용

장비 및 차량과의 안전사고 위험성이 높아

- 출입문을 설치하여 공사차량 및 동측 헬기장(긴급 재난구조) 출입차량

이외의 통행을 차단하고, 현장내 안전시설물 설치

□출입문(1EA), 안전표시판(4EA), A형 글림프휀스(92EA), 윙카호스(92EA)

○ 신호수 및 관리인부 배치

- 중장비 안전관리 및 안전시설물 유지관리, 출입문 통제 실시

□하단부 중장비 신호수(30일x2인) 및 시설물관리(22인) 투입

☞ 낚시꾼들의 하단부 도로사용(텐트설치) 계도 병행

Ⅳ		보고자 의견

○ 하단부 옹벽녹화 추진에 따른 안전대책에 대한 책임건설사업관리기술자의

의견이 타당하다고 판단되어 제출한 실정보고는 승인조치하고

○ 변경에 따른 공사비 증가분은 추후 설계변경시 반영하도록 책임건설사업관리

기술자에게 통보하고자 합니다.

붙임 : 1. 안전시설 설치계획 및 출입문 이미지 1부.

2. 책임건설사업관리기술자 기술검토 의견서 1부.  끝.

안전시설 설치계획 및 출입문 이미지

노들섬 하단부 안전시설 설치계획

하단부 출입문 및 안내표지 이미지