문서번호	생태환경과-1794
결재일자	2019.7.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	생태환경과장	공원부장
장창수	최병언	07/30 김인숙

- 이촌한강공원 녹지 정비사업 -

공사현장 실정보고에 대한 검토보고

2019. 7

생태환경과

- 이촌한강공원 녹지 정비사업 -

공사현장 실정보고에 대한 검토보고

자연성 회복사업 효과를 제고하고 공원이용 활성화에 기여하고자 시행중인「이촌한강공원 녹지 정비사업」과 관련하여 서울시설공단의 공사현장 실정보고에 대하여 아래와 같이 검토하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 이촌한강공원 녹지 정비사업

○ 공사기간 : 2019. 6. 25 ~ 9. 22

○ 공사내용 : 벌개제근(갈대제거), 수목식재(풍년화 등), 초화류(물억새 등) 식재 등

○ 도 급 비 : 금252,734,000원(관급자재비 217,142,130원 별도)

○ 도 급 자 : 청풍건설(주) 대표 박정일

▢ 실정보고 및 승인여부

구 분	변경사유 및 변경내용	승인여부
식 재 공 사	○ 한강철교 주변 꽃피는 수목식재 요청 민원 반영	승 인
	▸ 꽃사과(H3.5×R12): 0 → 20주
	▸ 매화나무(H3.5×R12): 0 → 26주
	▸ 사계줄장미(H0.6×2~3지): 0 → 948주
	○ 풍년화(H3.0) 수급불가로 규격 변경 및 풍지초 수급불가로 보리사초로 변경
	▸ 풍년화(H3.0×R10): 15주 → 0
	▸ 풍년화(H2.5×R5): 0 → 15주
	▸ 풍지초(하코네클로아): 3,280본 → 0
	▸ 보리사초(10.2㎝): 0 → 2,593본
	○ 현장여건 변경으로 초화류 식재물량 변경
	▸ 부처꽃(식물매트, 340×500×T40): 1,820㎡ → 1,577㎡
	▸ 물억새(식물매트, 340×500×T40): 1,126㎡ → 3,014㎡

구 분	변경사유 및 변경내용	승인여부
식 재 공 사	○ 풍년화 식재지 하부 및 자전거도로변 사면 미관을 위해 줄사철 식재 반영	승 인
	▸ 줄사철(8㎝): 0 → 9,504본
벌 개 제 근	○ 식재계획 구간에만 벌개제근 및 면고르기 시행	승 인
	▸ 벌개제근: 20,170㎡ → 6,566㎡
	▸ 면고르기(인력): 10,085㎡ → 3,283㎡
	▸ 면고르기(기계): 10,085㎡ → 3,283㎡
식 재 기 반 공 사	○ 디자인 화단 설치 예정 지역에 기존 수목 및 지방물로 경계 및 포장수량 변경	승 인
	▸ 콘크리트경계석(120×120×1,000): 686m → 498m
	▸ 쇄석포장A(T200): 895㎡ → 713㎡
	○ 디자인 화단 초화류 식재 지역 원활한 생육을 위해 기반 쇄석포장 제외
	▸ 쇄석포장B(T50): 310㎡ → 0
	○ 대상지내 노출된 맨홀 미관을 고려하여 목재로 마감
	▸ 평상형목재데크(T50): 0 → 9.4㎡
부대공	○ 자전거도로변 사면 줄사철 식재를 위한 예초 시행	승 인
	▸ 예초공: 0 → 1,443㎡
	○ 안전시설인 가설울타리, 보행안전도우미 등 실사용 물량 반영
	▸ 가설울타리(H1,200×W2,000): 0 → 249경간
	▸ 보행안전도우미(1일, 1인): 0 → 30인
폐기물	○ 벌개제근 면적 변경으로 실발생 물량 반영	승 인
	▸ 폐임목처리: 10.085ton → 3.283ton
관 급 자 재	○ 물억새 식재구간 연장으로 인한 물량 반영	승 인
	▸ 물억새(식물매트, 340×500×T40): 6,820장 → 18,254장
	○ 기존 수목 등 부처꽃 식재구간 감소로 인한 물량 반영
	▸ 부처꽃(식물매트, 340×500×T40): 11,023장 → 9,551장
	○ 수급 불가로 변경된 초화류(풍지초→보리사초) 관급자재로 구매
	▸ 보리사초(10.2㎝): 0 → 2,671본
	○ 식물매트 설치구간에 원활한 생육을 위해 토양개량제 포설
	▸ 토양개량제(하이그린유기토, 20㎏): 0 → 650포

▢ 개략공사비

○ 도 급 액 : 증 19,998,000원

┏ 당   초 : 금252,734,000원

┕ 변   경 : 금272,732,000원

구 분		공 사 비(원)			비고
		당 초	변 경
총공사비		469,876,130	564,548,000	증 94,671,870
도 급 비	계	252,734,000	272,732,000	증 19,998,000
	공급가액	229,758,182	247,938,182	증 18,180,000
	부 가 세	22,975,818	24,793,818	증 1,818,000
관급자재		217,412,130	291,816,000	증 74,673,870

○ 관급자재비 : 증 74,673,870원

┏ 당   초 : 금217,142,130원

┕ 변   경 : 금291,816,000원

▢ 예산활용 계획

○ 예산잔액 활용

예산액(천원)	기 품의액(천원)	예산잔액(천원)	비고
600,000	483,176	116,824

○ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 녹지시설 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비

▢ 보고자 검토의견

○ 위와 같이 승인 통보하여 선시공하고 향후 설계변경 시행 등 공사시행에 철저를 기하고자 함.

붙임 : 1. 공사현장 실정보고 승인요청 공문 1부.

2. 공사현장 실정보고 검토보고서(서울시설공단) 1부.

3. 설계용역사 검토의견

4. 변경(개략)내역서 1부.  끝.