문서번호	토목부-14324
결재일자	2019.8.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
백종임		장수철	08/09 代박일연
협조

교통소통 대책 용역비 검토보고

[구로고가 철거공사]

2019. 8.

도시기반시설본부

(토 목 부)

교통소통대책 용역비 검토보고

[구로고가 철거공사]

「구로고가 철거공사」중 보도확장공사 시행에 따른 원활한 교통소통을 위한 교통소통대책 수립 용역비 반영에 관하여 검토 보고 드림.

1		관련근거

❍ 교통운영과-1033(`19.01.17.) : 교통소통대책 사전검토 결과 통보

❍ 시경 교통관리과-1526(`19.01.22.) : 교통소통대책 검토의견 회신

❍ 광안건(구) 제2019-98(`19.07.19.) : 실정보고(교통소통대책 용역비 반영)

2		공사개요

❍ 위    치 : 구로구 가리봉동 140(남부순환로, 디지털단지5거리 주변)

❍ 규    모 : 고가차도 철거(폭 18.5m, 연장 536m)

❍ 공사기간 : '18.8. ~ '19.8.

❍ 도 급 비 : 7,783백만원

❍ 시 공 사 : 새천년종합건설 주식회사 외 2개사

❍ 감 리 사 : 동부엔지니어링㈜ 외 2개사

3		건설사업관리단 보고내용

□ 도로점용공사장 교통소통대책 수립 용역

❍ 보도확장공사 시행에 따른 도로점용공사장 교통소통대책 수립 필요

- 도로점용공사장 교통소통대책 심의결과 및 서울지방경찰청 의견반영

- 보도확장 공사 시 원활한 교통소통을 위한 교통소통대책 수립

❍ 교통소통대책 수립 용역비 산출

구 분		기본단위업무	세부단위업무	******	비고
직접비	직 접 인건비	1.공사의 개요	1)사업의 목적 2)사업의 개요 3)사업의 위치 4)교통소통대책에 관한 요약 5)예정공정표	***
		2.교통현황 및 분석	1)교통시설 현황 2)교통현황 분석	*****
		3.공사시행으로인한 교통영향분석	1)교차로 교통영향분석 2)가로구간 교통영향분석 3)보행통행 분석 4)대중교통 분석	*****
		4.공사시행으로 인한 문제점 및 개선방안	1)공사시행으로 인한 문제점 2)개선방안	*****
		5.홍보계획	1)안내방송 및 홍보 2)공사안내 표지판 설치	***
		6.모니터링 시행계획	1)모니터링 시행계획	***
		7.성과품 작성	1)성과품 작성	*****
		8.기술협의	1)보고/협의 2)관계기관 협의 3)심의	*****
	직접경비	현황조사비, 출장비, 인쇄비, 회의 준비비 및 기타		*****
간접비	제경비	(직접인건비×110∼120%), 110%적용		******
	기술료	(직접인건비+제경비)×20~40%, 20%적용		*****
합 계		원단위 절삭: -57천원		******

- 산출기준 : 교통표준품셈 적용

❍ 용역비 견적대비 현황

***	*****	***	******* *****	**
******	********	********	********	*****
******	*

□ 용역비 증·감 현황

【단위 : 천원】

공 종	당 초	변 경	증△감	비 고
*********
**************	*
**********	*	******	******
************		******	******
**********	*	*****	*****
***********	*	******	******

4		검토결과

❍ 보도확장공사 중 원활한 교통소통을 위해 관계기관(교통운영과,서울지방경찰청) 심의의견을 반영하여 교통소통대책 수립에 관한 용역비를 반영하고자 하는 건설사업관리단 보고내용은 타당한 것으로 판단됨.

5		조치계획

❍	위 건에 대하여 실정보고 승인 통보하고 추후 설계변경에 반영코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 실정보고 검토의견서 1부.  끝.