	서울특별시도시기반시설본부
수신자	설비부장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기통보[노들섬특화공간 조성사업 기계설비공사]

1. 설비부-11575(2019.07.29.)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 의뢰한 [노들섬특화공간 조성사업 기계설비공사] 계약건에 대하여 붙임과 같이 납품기한 연기되었음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 변경계약 체결현황

(단위:원)

구분	당초	변경	비고
계 약 자	세원에스디에스(주)	변경없음
게약금액	370,000,000	변경없음
납품기한	2019.08.31.	2019.10.20.

붙임 : 물품계약서 1부.  끝.

	총무부장
주무관	최필원		재무예산과장	홍수열		총무부장	08/13 정진일
협조자
시행	총무부-16131	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 청계천로 8(무교동,프리미어플레이스빌딩)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-2373	/전송		/	womchoi@seoul.go.kr	/	부분공개(5)