문서번호	거점성장추진단-905
결재일자	2019.8.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
실무사무관		애니타운팀장	산업거점활성화반장
임형준		김인호	08/14 代김정안
협조
	주무관		김민주

서울애니메이션센터 재건축 사업

지하안전영향평가 용역기간 변경계획

2019.8.

경 제 정 책 실

(거점성장추진단)

-서울애니메이션센터 재건축 사업-

지하안전영향평가 용역기간 변경계획

소규모 지하안전영향평가 용역과 관련하여 협의기관인 서울지방국토관리청의 보완 의견에 따라 용역기간을 연장하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 서울애니메이션센터 재건축사업 소규모 지하안전영향평가 용역

○ 용역기간 : 2018.5.23. ~ 2019.8.20.

○ 계 약 자 : *********

○ 용 역 비 : ***********

○ 용역범위 : 사업부지 8,473㎡

○ 과업내용

- 지하수 변화에 의한 영향 및 지반안전성 검토

- 지하안전 확보방안 수립 등 지하안전영향평가서 작성

- 지하안전영향평가 협의에 필요한 사항 등

□ 변경내용

*****	****	*****	***
*******	*********************	***********************	*****

*************************************************************************************

- 지하안전영향평가서 일반사항 등 5개 분야 총 22개 항목 보완 요청

※ 세부 내용은 붙임의 서울지방국토관리청의 보완요청서 참조

**************

*************************************************************************

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

****************

************************

**************************************************************************************************

*****************************************************************

□ 향후일정

○ ’19.8.14.	계약부서(재무과)에 용역계약 변경 의뢰

붙임  1. 용역기간 연장 공문 및 합의각서 각 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 서울지방국토관리청 공문 1부.  끝.