문서번호	시설보수과-7193
결재일자	2019.8.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	08/20 박문희
협조
	관리단속과장		박종윤

- 오금지하차도 보수공사

설계변경(정산) 보고

2019. 08.

오금지하차도 보수공사

설계변경(정산) 보고

「오금지하차도 보수공사」와 관련, 기 보고한 공사물량 증·감 및 각종보험료 미사용 등에 따른 최종 정산 처리된 설계변경내역이 감독기관인 시설공단으로부터 제출되어 검토보고 후 조치코자 함.

※ 시설공단 공사감독1처-4923(2019.8.16.)

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 오금지하차도 보수공사

○ 공사기간 : 2019. 2. 26 ~ 2019. 8. 24

○ 공사규모

- 아스콘포장 A=61.28a, 신축이음장치 108m, 콘크리트보수공 873.3㎡

○ 도 급 비 : 308,907,700원

○ 도 급 자 : 정민바우텍(주) 대표 차정훈

○ 감 독 자 : 서울시설공단 공사감독1처

○ 예산현황 : 총공사비 450,000천원

(도급비 352,000천원. 관급자재비 85,837천원. 이전비 12,163천원)

	< 예산현황 >
▷예산배정: 450,000천원(도급비 352,000, 관급비 85,837, 이전비 12,163) ▷계약금액: 406,708천원(도급비 308,908, 관급비 85,837, 이전비 12,163) ▷변경금액: 424,685천원(도급비 362,500, 관급비 51,634, 이전비 10,551) ※ 낙찰차액 사용 : 17,777천원

Ⅱ		설계변경(정산) 검토보고

❏ 서울시설공단

○ 보고내용

○ 관련근거

- 공단 공사감독1처-1364(2019.4.1) : 착수전 설계도서 검토보고

- 시설보수과-2859(2019.4.4.) : 설계도서 검토보고 회신

- 공단 공사감독1처-1703(2019.4.16.) : 현장조사 결과 보고

- 시설보수과-3507(2019.4.24.) : 현장조사 결과보고에 따른 회신

- 시설보수과-6703(2019.8.1.) : 재경비 실정산 반영 지시

○ 도급비 변경내용 : (증) 53,592,300원

- 신축이음장치 깊이 변경 반영 : (증)31,349천원

- 콘크리트보수공 경찰서 협의결과 반영(야간) : (증)36,695천원

- 제경비(보험료) 미사용에 따른 실정산 반영 : (감)14,450천원

· 건강보험료         : 당초 3,374,304원 → 정산 0원

· 노인장기요양보험료 : 당초   287,153원 → 정산 0원

· 연금보험료         : 당초 4,701,043원 → 정산 0원

· 퇴직공제부금       : 당초 2,092,659원 → 정산 170,000원

· 안전관리비         : 당초 5,209,410원 → 정산 3,693,000원

· 환경보전비         : 당초 1,715,314원 → 정산 0원

· 건설기계대여대금   : 당초   933,893원 → 정산 0원

○ 관급자재(아스콘) 변경 : (감)34,204천원

○ 폐기물처리 물량 변경 : (감)1,612천원

○ 공사비 변경 내역

구 분	당 초	변 경	증, 감	비고
총 공사비	406,907,700	424,684,320	(증) 17,776,620	(단위:원)
도 급 비	308,907,700	362,500,000	(증) 53,592,300
관 급 비	85,837,000	51,633,320	(감) 34,203,680
이 전 비	12,163,000	10,551,000	(감) 1,612,000

※ 예산과목 : (2019예산) 도로시설과, 도로시설관리, 지하차도시설관리, 오금지하차도보수, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅲ		검토의견 및 조치계획

○ 공사진행중에 현장실정 보고된 사항에 대하여 기 승인 처리한 내용이 반영되었고, 계약자가 납입확인서를 미제출한 보험료 등에 대하여 실정산 반영

○ 폐기물처리비는 별도입찰에 의한 계약금액으로 반영하였으며, 실정산물량 반영

○ 관급자재는 실정산물량(1,175톤→740톤) 및 조달청 계약단가 변경내역(65,860→69,400원/톤) 반영

○ 상기와 같은 변경물량 등에 의거 설계변경되었음을 확인하였기 설계변경 승인코자 함

붙임 : 1. 설계변경(정산) 설계도서 1부.

2. 현장실정보고서 및 검증확인서 1부.  끝.