투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	공사기간 변경 계약의뢰(시립북부장애인복지관 증축 소방·전기·통신공사)

1. 설비부-12933호(2019.08.23.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리 부에서 시행 중인「시립북부장애인복지관 증축 소방·전기·통신공사」에 대하여 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경 계약내용

(단위 : 원)

구 분	업체명	변경 전	변경 후	증·감
소방공사	㈜우현이앤지	‘18.04.18. ~ ’19.08.26.	‘18.04.18. ~ ’19.09.30.	증 35일
전기공사	㈜세아네트웍스	‘18.05.10. ~ ’19.08.26	‘18.05.10. ~ ’19.09.30.	증 35일
통신공사	㈜엘에스케이네트워크	‘18.05.25. ~ ’19.08.26	‘18.05.25. ~ ’19.09.30.	증 35일

※ 공사금액 : 변경없음

나. 변경사유 : 선행 공정(건축공사)에 맞춰 준공기한 연장이 필요함

다. 공사기간 연장 귀책기관 : 도시기반시설본부

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

마. 예산과목 : 장애인자립지원과, 장애인자립기반 구축, 장애인복지시설 확충 지원, 시립북부장애인복지관 증축, 시설비

붙임  : 1. 검토보고서 1부.

2. 합의각서 각 1부. 끝.

	설비부장
주무관	조윤제		건축설비과장	代백남진		설비부장	08/23 代여인웅
협조자
시행	설비부-12945	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8631	/전송	02-3708-8659	/	ssingcho@seoul.go.kr	/	부분공개(5)