“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	총사업비 조정 재요청(태릉~구리IC간 광역도로확장)

1. 도로계획과-7879(2019.6.5.)호와 관련입니다.

2. 우리 시와 경기도(구리시)에서 추진 중인 「태릉~구리IC간 광역도로확장」관련하여 기본설계에 따른 총사업비 조정(변경)을 재요청하오니 광역도로 건설사업이 원활히 추진될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 총사업비 조정사항

- 사 업 비 : 당초 62,141백만원 → *************

- 사업기간 : 당초 2009 ~ 2019  → **************

나. 조정(변경) 사유

- 2017.7월 1차 조정(기본계획 단계) 총사업비에서 2019년 기본설계에 따른 총사업비 조정(변경)

- 예비타당성조사 완료(2009.7월) 후 사업추진방안 관계기관 협의 지연(2015.12월 협약 완료) 등으로 절대공기 확보를 위한 사업기간 연장 필요

붙임 : 1) 총사업비 조정 요구서(2차) 1부

2) 총사업비 조정 설명자료 1부(기송부)

3) 태릉~구리IC간 광역도로확장 기본설계 보고서 1부(기송부).  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	국토교통부장관(재정담당관),대도시권광역교통위원회장(광역시설운영과장)
주무관	홍광호		광역도로계획팀장	시희식		도로계획과장	08/26 안대희
협조자
시행	도로계획과-11789	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 신청사 10층 (태평로1가)	/
전화	02)2133-8087	/전송	02)2133-0763	/	samsamc@seoul.go.kr	/	부분공개(5)