등록번호

푸른도시과-13639

주무관

공원기획팀장

푸른도시과장

안전건설교통국장

부구청장

구청장

등록일자

2019.8.23.

유진이

김종철

송행국

代성영주

서영관

08/26

문석진

결재일자

2019.8.26.

공개구분

부분공개(6)

협  조

협치지원팀장

이지연

도로관리팀장

최경준

기전팀장

이경호

교통시설팀장

조숭현

협치조정관

서정순

민·관 협치를 통한「아이들이 꿈꾸고, 만드는 놀이터」

신기한놀이터 조성사업 추진계획

서 대 문 구

푸른도시과

사전 검토 항목
☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목		검토 여부 ( ■ 표시 )
구민참여 등 고려여부	구민	유 ■ ☞ 방법(주민공유회 등)	해당무 □
	협치파트너	유 ■ ☞ 방법(신기한놀이터 워킹그룹-협치 보육분과)	해당무 □
	이해당사자	유 ■ ☞ 방법(어린이 디자이너 워크샵, 어린이 참여디자인 주민공유회)	해당무 □
	전문가	유 ■ ☞ 방법(총괄기획가 위촉-편해문)	해당무 □
	기타	유 □ ☞ 방법( )	해당무 ■
관계기관 및 부서협의	관계기관·단체	유 □ ☞ 기관명( )	해당무 ■
	관련부서	유 ■ ☞ 부서명(기획예산과)	해당무 □
관련법령	법령규정	검토 ■ ☞ 법령명(어린이놀이시설 안전관리법)	해당무 □
	공직선거법	검토 □ ☞ 저촉여부( )	해당무 ■
	조례 및 규칙	검토 □ ☞ 조례규칙명( )	해당무 ■
재원확보 및 처리절차	예산확보	구비 □ 시비 ■ 국비 ■ 기타 □ ( )	해당무 □
	처리절차	투자심사 □ 용역심사 □ 심의 □ 기타 ■	해당무 ■
갈등관리	해소방안	대책마련 □ 이해조정 □	해당무 ■
홍보	홍보수단	보도자료 ■ 소식지 ■ SNS ■ IPTV □ 기타 □ (홍보 포스터)	해당무 □
기타 고려사항	기타	고용효과 □ 성인지 □ 장애인 ■ 노인 □ 아동 ■ 한부모가정 □ 안전 □ 유지관리비용 □ 기타 □ ( )	해당무 □
바른 우리말	행정순화어	불필요한 외국어·외래어 사용여부	검토완료 ■

민·관 협치를 통한「아이들이 꿈꾸고, 만드는 놀이터」

신기한놀이터 조성사업 추진계획

민•관•어린이•전문가(아동) 협치를 통해 어린이들이 자연과 함께 숨 쉬며 꿈을 키울 수 있는 모험적이고 자연친화적인 놀이공간을 조성하고자 함.

Ⅰ	추진근거

□ 서대문구 지역사회 혁신계획(‘18 서대문 협치기반 구축 및 분야별 협치 사업 추진)

【정책기획담당관-12786호(2017. 8. 28.)】

□ 신기한놀이터 조성사업 추진계획(기본 및 실시설계용역)

【푸른도시과-17905호(2018. 11. 2.)】

Ⅱ	추진방향

□ 서대문 협치회의(보육분과)와 협치를 통한 지역사회 문제해결,

지역의 협치 기반조성 등 지속 가능한 지역발전 도모

□ 놀이터 디자이너 및 놀이운동 전문가(편해문)를 사업 총괄계획가로

위촉하여 어린이들이 원하는 놀이터가 최대한 구현 될 수 있도록 조성

□ 장애·비장애 어린이들이 동등하게 이용할 수 있는 놀이공간 조성

Ⅲ	사업개요

□ 사 업 명 : 신기한놀이터 조성사업

□ 공사기간 : 2019. 8. ~ 10.

□ 대 상 지 : 서대문구 홍제동 산 41-29일대(송죽원 인근)

□ 사업내용 : 원목 놀이기구 설치, 모래 놀이공간 조성, 데크로드 설치 등

□ 사 업 비 : 535백만원(시비보조금 235, 특별교부세 300)-명시이월

[용역 27,500천원, 분묘이전 협의보상 3,610천원, 공사 및 폐기물 503,890천원]

※ 토지보상비 2,585백만원(시비)[2017년 ~ 2018년 추진]

Ⅳ	그간 추진경위

□ 2017.  1. ~ 2018. 9. : 보상추진 및 완료, 소유권 이전

□ 2017. 11. ~ 2019. 5. : 협치 워킹그룹회의(20회)

□ 2018.  6. 15.        : 주민공청회

□ 2018. 10. 14.        : 총괄계획가 위촉 및 어린이 디자이너 워크샵

□ 2018. 12.  3.        : 기본 및 실시설계 용역 착수

□ 2018. 12. 14.        : 어린이 참여디자인 주민공유회

□ 2019.  3.  9.        : 기본설계 드로잉 주민공유회

□ 2019.  4. 16.        : 용역보고회

□ 2019.  5. 10.        : 기본 및 실시설계 용역 완수

□ 2019.  5. ~ 6.       : 부지 내 분묘 이장 및 협의 보상

□ 2019. 7. 1. ~ 8. 5.   : 명칭특허 출원 의뢰, 계약심사 및 일상감사

Ⅴ	주요 추진내용

□ 총괄계획가 위촉 : 편해문

	[신기한놀이터 조성 총괄계획가 프로필]
		직 업	놀이터 디자이너, 놀이터 비평가, 놀이운동가
		출생년도	1969년	성별	남
		주요이력	행정중심복합도시 어린이놀이터 특화 시범사업 총괄계획가
			서울특별시교육청 놀이터재구성위원회 위원장
			순천시 「기적의놀이터」 조성 총괄기획자
			시흥시 「PLAYSTART」 추진단장
	편 해 문		경기도 아이누리 놀이터 협의회 위원
			모험놀이터 만들기 협회 정회원

□ 총괄계획가 주요의견(조성계획)

○ 안락한 아기집의 느낌을 가질 수 있도록 원형 놀이구역을 3개소 분산 배치

○ 놀이구역을 둘러싼 산책로는 천연목재(멀바우)를 이용하여 친환경 산책로 조성

○ 모래놀이 공간은 다른 놀이터와 차별화 되도록 동해안(주문진) 모래를 포설하고, 모래깊이를 50cm이상 확보하여 감각(촉감) 놀이공간 조성

○ 모래 놀이공간 안에 휠체어나 유모차가 진입하여 함께 참여할 수

있도록 진입 데크 공간 조성

○ 놀이시설은 내구성이 강한 원목으로 제작한 북유럽산 놀이기구로 반영하고, 급수시설이 탑재된 놀이기구 설치로 창의적인 놀이공간 조성

○ 모래놀이터 내부 일부구간을 포장하여 사방치기 등 특화 놀이공간 반영

○ 높은 곳에서 조망할 수 있는 놀이기구 설치 (넷슬라이드) → 미반영

□ 워킹그룹회의 주요의견(서대문구 협치 보육분과)

○ 총괄계획가 의견을 적극 반영 추진하고, 친환경 놀이공간이 되도록 자연물을 이용한 놀이공간 조성

○ 화장실 및 관리실(수유실 등) 설치 반드시 반영(추경 확보)

Ⅵ	기대효과

□ 기존 관 주도형 놀이터 조성이 아닌 아이들과 전문가가 참여하여 아이들이 원하는 놀이터를 조성함으로서 놀이터의 새로운 패러다임 형성

□ 자연 지형을 이용한 놀이공간 조성으로 모험심을 자극하고, 자연물을 이용한 놀이기구 설치로 자연친화적인 놀이공간 조성

□ 민, 관, 전문가, 어린이들이 서로 협치하여 놀이터를 조성함으로서

지역사회 문제해결과 협치 기반 조성 및 지속가능한 지역발전 도모

Ⅶ	향후 추진일정

□ 2019.  8.   : 공사발주 및 착공

□ 2019.  9.   : 어린이 감리단 위촉 운영

□ 2019. 10.   : 어린이놀이시설 안전검사 및 어린이놀이터 개장

Ⅷ	행 정 사 항

□ 토  목  과 : 신기한놀이터 주요 진입도로 개선, 어린이 안전 특화거리 요청

□ 안전치수과 : 재난 방송시스템(인근 홍제천 수위감지 시스템) 연계 안전 확보,

재난 방송 시스템을 활용한 어린이 음악방송 제공

□ 교통행정과 : 신기한놀이터 인근 주차난 해소를 위한 장기적 주차공간 확보 검토

붙임  1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 조성계획(안) 및 주요시설물 이미지 1부.

3. 주요 추진사진 1부.  끝.