“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기요청(건설폐기물 처리용역-강북)

1. 교량안전과-14897호(2019.08.28.)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 『2018 교량시설물일상유지보수공사(강북) 외 1개소 건설폐기물처리용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 2018 교량시설물일상유지보수공사(강북) 외 1개소 건설폐기물처리용역

나. 용역기간 : 2018.05.23. ~ 2019.08.31

다. 용 역 사 : ㈜대아이디아이  대표 김상회

라. 준공기한 변경 요청내용

- 당초 : 2018.05.23. ~ 2019.08.31

- 변경 : 2018.05.23. ~ 2019.09.30

마. 귀책사유 : 발주처

바. 연기사유 : 용역 과업에 포함된 워커힐고가 보수공사 연기로 인한 사유

사. 예산과목

- 교량관리, 고가차도 및 입체교차관리, 워커힐고가 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	교량안전과장
주무관	임승민		강북일반교량팀장	代김태형		교량안전과장	전결 08/28 김종호
협조자
시행	교량안전과-14933	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 2층 교량안전과 (서소문동)	/
전화	02-2133-1954	/전송	02-2133-1429	/		/	대시민공개