준공기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 : 2018년 교량시설물 일상유지보수공사(강북)외 1개소 건설

폐기물처리용역

나. 계약업체 : ㈜대아이디아이 대표 김상회

다. 계약금액 : 7,735,800원

라. 계약년월일 : 2018. 05. 21

마. 착수년월일 : 2018. 05. 23

바. 준공기한   : 2019. 08. 31

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2019. 09. 30

나. 연기사유 귀책소재 : 발주처

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 : 용역의 과업에 포함된 워커힐고가 보수공사 준공기한에 따른 용역기간 연장

2019년  8월

교량안전과장 김종호 (인)

서울특별시(분임)재무관 귀하