문서번호	하천관리과-12845
결재일자	2019.8.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장
최병희	이문주	08/30 한유석
협 조

빗물펌프장 시설용량증대 타당성조사 용역 추진계획 보고

2019. 8.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「빗물펌프장 시설용량증대」

타당성조사 용역 추진계획 보고

우리시 방재성능 목표인 30년빈도에 미달하는 21개소 빗물펌프장에 대한 효율적인 시설용량 증대방안 마련을 위해 “빗물펌프장 시설용량증대 타당성조사 용역” 추진계획을 보고 함.

Ⅰ		추진근거

○ 2010년 풍수해 대책 종합보고(시장방침 477호)

○ 빗물펌프장 증설 1단계 사업완료 보고(행정2부시장 방침 제139호)

○ 지역별 방재성능목표 설정·운영지침(2012.8.31. 소방방재청)

Ⅱ		추진경위

○ 2007.06 ~ 11. : 빗물펌프장 능력향상 타당성조사

○ 2007.12 ~ ‘11. 11. : 시설용량증대 기본 및 실시설계용역 시행(41개소)

○ 2009.01 ~ ‘13. 09. : 1단계 증설사업 완료(41개소)

○ 2012.12. ~ 현재 : 2단계 증설사업 추진 중

Ⅲ		시설현황(설계빈도)

○ 빗물펌프장(120개소)의 80%(97개소) 30년 빈도 달성

(단위 : 개소)

계	설계빈도			비 고
	10년	20년	30년 이상
120	19	4	97

Ⅳ		용역 추진계획

□ 과업개요

○ 대상 : 30년빈도에 미달하는 서초 등 21개 빗물펌프장

구 분	사 업 명	펌 프 장	비 고
배수개선 사업연계 (15개소)	강남역 일대 배수개선사업	서초, 사평
	사당역 일대 배수개선사업	방배
	한강로 일대 방재시설 확충	삼각지,용산,빙창,문배
	유입관로 정비사업	중곡, 영등포, 신길, 심원, 고척1, 금호, 서래, 양재
재개발 사업 연계 (4개소)	한남 재정비 촉진지구	보광, 동빙고
	압구정, 고덕 재건축사업	잠원, 고덕
기타(2개소)	사유지 위치	대림2,제기1

※ 기본계획 및 기본설계 완료된 펌프장은 과업에서 제외(중곡 등 5개소)

○ 유역면적 : 1,907(ha)

○ 배수용량 : 13,672(㎥/분)

○ 용 역 비 : 768백만원

□ 과업내용

○ 유역단위 종합적인 방재시설 현황조사 및 분석

○ 30년 빈도의 용량 확충을 위한 사업계획 수립

- 펌프장 시설용량 30년 빈도 시설개선

- 적정 시설규모 검토 및 시설물 배치, 최신의 설비구축 등

Ⅴ		사업 효과

□ 빗물펌프장 방재성능 목표 달성을 위한 세부 추진방안 확정

○ ‘19. 8.(97개소) ⇒ ’22년(104개소) ⇒ ‘23년 이후(120개소(100%))

□ 시설물 안전성 개선 및 주민활용 복합공간 확충

○ 노후 시설물 보수·교체를 통한 시설물 운영 및 안전성 개선

○ 방재시설과 주민복지를 동시에 실현하는 공간으로 탈바꿈

Ⅵ		향후 계획

○ 2019. 08 : 기술용역 타당성 심사 의뢰

○ 2020. 02 : 용역발주 의뢰

○ 2020. 05 : 용역착수

○ 2021. 04 : 용역준공

붙임 : 1) 빗물펌프장 위치도  1부.

2) 과업내용서 1부.

3) 내역서 1부.   끝.