“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	서버입주 설치계획서 제출

우리부서에서 추진하고 있는 「3D 기반 Virtual Seoul 시스템 구축 용역」과 관련하여 서버설치를 위해 아래와 같이 진행하고자 하니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 작업일자 : 2019. 9. 25(수) ~ 10. 2(수)

나. 작업내용 : 서버설치 및 케이블 포설(상세내역 붙임 참조)

일자	작업내용	작업자
9.25	자재입고 및 검수 네트워크케이블 포설 각 케이블 라벨링 작업	공간정보담당관, 용역수행사 올포랜드 외 작업자 3명
9.30	네트워크 전원케이블 작업 전원인가, 하드웨어 정상작동 확인	공간정보담당관, 용역수행사 올포랜드 외 작업자 3명
10.1	서버운영체제설치, 인터페이스IP설정 스토리지 볼륨구성, 서버할당, L4ㅅ위치 정상작동 확인 및 서비스구성 등	공간정보담당관, 용역수행사 올포랜드 외 작업자 3명
10.2	Netbackup 설치, 설치확인 및 검수 전체시스템 설치 및 동작확인 검수	공간정보담당관, 용역수행사 올포랜드 외 작업자 3명

붙 임 : 서버설치계획서  1부.   끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시 데이터센터소장(정보자원운영과장),서울특별시 데이터센터소장(인터넷통신과장)
주무관	정인성		공간정보기획팀장	서미연		공간정보담당관	09/03 최영창
협조자
시행	공간정보담당관-10236	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 3층	/
전화	2133-2836	/전송	2133-1073	/		/	대시민공개