“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”
		강남구
수신	내부결재
(경유)
제목	한파대비 강남따숨소 디자인 제작설치 및 운영용역 설계변경

재난안전과-20140(2019. 9. 6.)호와 관련하여 강남따숨소 디자인 제작설치 및 운영용역 설계변경을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

1. 사 업 명: 한파대비 강남따숨소 디자인‧ 제작설치 및 운영 용역

2. 사업규모: 하우스형 따숨소 50개소 제작‧설치, 유지보수, 철거, 보관, 재설치등

3. 사업기간: 2018. 12. 17.~2019. 12. 31.

4. 용 역 비: 348,271천원

5. 도 급 자: 주식회사 오라클 환경디자인

6. 설계변경내역

가. 수량: 총50개소(대형10, 소형40) ⇒ 소형63개로 증가

나. 금액                                                         (단위 : 천원)

구분	당초	번경	증감	비고
총용역비	348,271	371,833	23,562	사고이월된 원인행위 미필 이전비와 낙찰차액(25,679천원)활용

다. 사업기간: 변동 없음

7. 설계변경사유: 붙임1 설계변경사유서 참조

8. 예산과목: 재난안전과, 재난예방 강남구현, 재난없는 안전강남 구현, 한파대비                  온기쉼터 설치운영, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 시행계획 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.  끝.

주무관						조성민				재난관리팀장					강동호						★재난안전과장						김석래			안전교통국장						전결 09/18 이철
협조자		주무관					조성민					주무관				김성하							계약팀장					이영순			재무과장 직무대리						지영애
		기획재정국장					장원석
시행			재난안전과-20928										(						)		접수												(					)
우	06090				서울 강남구 학동로 426																			/		www.gangnam.go.kr
전화		02-3423-6944						/전송			02-3423-8836						/													/		부분공개(5)