문서번호	도시철도토목부-9723
결재일자	2019.9.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		토목2과장	도시철도토목부장
김민수		방영복	09/19 정대현
협 조
	주무관			김윤수

「진접선(4호선연장) 차량기지 2공구 건설공사」

폐기물 처리 현안보고에 따른 실정보고 검토

2019.  9.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「진접선(4호선연장) 차량기지 2공구 건설공사」

폐기물 처리 현안보고에 따른 실정보고 검토

「진접선 차량기지 2공구 건설공사」설계도서 합동 검토회의에서 지적된 구조물 철거 및 폐기물 수량에 대한 건설사업관리단 현안 보고에 대한 검토 보고임

Ⅰ		사업개요

❍ 공사구간 : 경기도 남양주시 진접읍 금곡리 및 서울시 노원구 창동차량기지 일원

❍ 공사규모 : 차량기지 197,400㎡(14개 동), 차량기지 진입도로 L=1.14km,

창동차량기지 철거(29개 동)

❍ 공사기간 : 2018.12.31. ~ 2026.02.26.

❍ 공사금액 : 108,945백만원

❍ 시 공 사 : 현대엔지니어링(2주)외 1개사

❍ 감 리 단 : ㈜서현기술단외 4개사

Ⅱ		추진경위

❍ ‘19.05.31 제1차 설계도서 합동 검토회의(발주처,설계자, 건설사업관리단, 시공사)

❍ ‘19.06.13 제2차 설계도서 합동 검토회의(발주처,설계자, 건설사업관리단, 시공사)

❍ ‘19.07.10 제3차 설계도서 합동 검토회의(발주처,설계자, 건설사업관리단, 시공사)

❍ ‘19.07.18 제4차 설계도서 합동 검토회의(발주처,설계자, 건설사업관리단, 시공사)

❍ ‘19.09.06 진접선 차량기지 2공구 폐기물 처리 현안보고 및 발주요청(건설사업관리단)

Ⅲ		설계도서 검토결과

❍ 차량기지

- 가설사무실 및 울타리 철거

※ 무근콘크리트 깨기(164㎥) → 삭제 (시공단가 기 반영)

- 기존 가옥철거 (건설표준품셈의 ㎡당 건축물 해체 적용)

※ 철근콘크리트깨기 4.29㎥ → 건축물 해체 23.4㎡

- 내역서 수량

공 종	규 격	단 위	기존구조물 철거 (차 량 기 지)									당초 변경
			①수로 철거	②기존 옹멱	③도로 철거	④흄관 철거	⑤울타리 철거	⑥기존 가옥철거	⑦가설/ 사무실 울타리	⑧임목 철거	합 계
무근콘크리트깨기	T=300mm 미만	㎥				25.09 25.09			164.10 -		189.190 25.090
철근콘크리트깨기	T=300mm 미만	㎥	-					4.29 -			4.286 -
철근콘크리트깨기	T=300mm 이상	㎥	34.80 34.80	-							34.800 34.800
콘크리트포장깨기	무근조,기계,T=30cm이하	㎥			415.20 415.20						415.200 415.200
흄관철거	D1200	m				26.00 26.00					26.000 26.000
석축헐기	찰쌓기, 뒷길이 35cm	㎡		265.00 265.00							265.000 265.000
건축물해체		㎡						- 23.40			- 23.400
비닐하우스해체		㎡						224.30 224.40			224.300 224.300

- 폐기물 수량

폐기물처리 (콘크리트)	무근콘크리트	ton	-	-	954.96 954.96	57.707 57.707	-	-	377.430 377.430		1,390.097 1,390.097
폐기물처리 (콘크리트)	철근콘크리트	ton	83.520 88.520	-	-	-	-	10.287 32.971	-		93.807 116.491
폐기물처리 (혼합건설폐기물)	건설폐기물	ton						9.858 -	-		9.858 -
폐기물처리 (고재처리)	건설폐기물 (금속,철류)	ton						- 1.123			- 1.123
폐기물처리 (혼합건설폐기물)	혼합폐기물	ton						- 4.75			- 4.750
폐기물처리 (임목)	임목폐기물 (가지,,뿌리)	ton								7,292.682 7,292.682	7,292.682 7,292.682
폐기물 상차		ton	83.520 88.520	-	954.960 954.960	57.707 57.707	-	20.145 -	377.430 377.430	- -	1,493.762 1,473.617

○ 진입도로

- 원금곡교 가각부, B라 새마을교, 관정 폐기물 수량 산출 후 집계표 누락분 반영

- 기존 가옥철거 (건설표준품셈의 ㎡당 건축물 해체 적용)

※ 콘크리트깨기 21.7㎥ → 건축물 해체 2,283.02㎡

- 한국감정원 진입도로 지장물 조사 반영에 따른 수량 변경

- 내역서 수량

공 종	규 격	단 위	기존구조물철거 (진 입 도 로)										당 초 변 경
			원금곡교가각부①	B라새마을②	③ 수로 철거	④ 관정	⑤ 기존옹벽	⑥ 도로철거	⑦ 흄관	⑧ 울타리	⑨ 기존 가옥	⑩ 임목 철거	합 계
무근콘크리트깨기	T=300mm 미만	㎥				- 4.97			-				- 4.967
무근콘크리트깨기	T=300mm 이상	㎥		- 5.526									- 5.526
철근콘크리트깨기	T=300mm 미만	㎥			59.28 59.28						21.70 -		180.978 59.280
철근콘크리트깨기	T=300mm 이상	㎥	- 1.200	- 163.351	-		28.00 28.00						28.0 192.551
콘크리트포장깨기	무근조,기계,T=30cm이하	㎥						235.60 558.97					235.600 558.974
아스콘포장깨기	기계,T=30cm미만	㎥	- 0.650	- 2.296				280.80 370.44					280.800 373.386
흄관철거	D1000	m	- 56.00	- 66.00									- 122.000
석축헐기	찰쌓기, 뒷길이 35cm	㎡					36.00 36.00						36.00 36.00
울타리철거	메쉬 1.6	m								215 215			215.000 215.000
건축물해체		㎡									- 1,854.97		- 1,854.97
부속건축물해체		㎡									- 428.05		- 428.050
슬레트해체 및 제거	외장재	㎡									110.70 365.29		110.700 365.290
비닐하우스해체		㎡									37.0 451.75		37.00 451.750

- 폐기물 수량

폐기물처리 (콘크리트)	무근콘크리트	ton	- 87.455	- 115.782		- 11.424		541.88 1,285.64		- 9.148			541.880 1,509.450
폐기물처리 (콘크리트)	철근콘크리트	ton	- 2.880	- 392.042	142.272 142.272		67.200 67.200				292.076 2,915.0		501.548 3,519.394
폐기물처리 (아스콘)	아스콘	ton	- 1.528	- 5.396				659.880 870.534					659,880 877,457
폐기물처리 (폐석면)	폐석면	ton									1.162 3.836		1.162 3.836
폐기물처리 (혼합폐기물)	건설폐기물 (금속및철재류)	ton									279.906 -		279.906 -
폐기물처리 (고재처리)	건설폐기물 (금속및철재류)	ton									- 99.312		- 99.312
폐기물처리 (혼합건설폐기물)	혼합폐기물	ton									- 419.792		- 419.792
폐기물처리 (임목)	임목폐기물 (가지,뿌리)	ton										26.67526.675	26.675 26.675
폐기물상차		ton	- 91.863	- 513.220	142.272 142.272	- 11.424	67.200 67.200	1,201.76 2,156.174	-	- 9.148	573.144 -		1,984.376 2,991.301

Ⅳ		건설사업관리단 검토 의견

○ 보상이 진행되어 즉시 착공이 필요한 차량기지 및 진입도로의 구조물 철거 물량을 확인한 결과 설계 누락 및 오류가 발견되어 물량 변경을 요청한 것으로 변경 수량은 적정함.

○ 창동차량기지 철거(서울시 노원구 상계동 일원) 물량은 검토 후 추후 보고 예정

Ⅴ		조치계획

○ 폐기물 처리 현안보고는 원활한 공사 추진을 위해 건설사업관리단의 검토 의견과 같이 변경된 수량으로 「폐기물 처리 용역」 시행

- 창동차량기지는 물량 확인 후 별도 발주

붙임  1. 수량산출서(진입도로, 차량기지, 신축) 각 1부

2. 도면(진입도로, 차량기지, 신축) 각 1부

3. 진접선 2공구 차량기지 폐기물 변경 내역서 1부.  끝